코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 변경요청(남산 회현자락 현장유적박물관 통신공사)

한양도성도감-6618(2020.6.29.)호와 관련한 “남산 회현자락 현장유적박물관 통신공사”의 공사 현장여건상 계약기한 변경(연장)을 요청드리니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 남산 회현자락 현장유적박물관 통신공사

나. 계약일자: 2019.3.25.

다. 계약상대자: ㈜경성네트웍

라. 변경계약사항

계약기한 변경	변 경 전	변 경 후	사유
	2019.3.25. ~ 2020.9.30.	2019.3.25. ~ 2021.5.30.	공사기간 연장

마. 귀책사유: 우리시(공사기간 연장)

붙임  1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	백영기		도성관리팀장	代왕승찬		한양도성도감과장	06/29 안중호
협조자
시행	한양도성도감-6658	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-764-9656	/전송		/	baekki98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)