문서번호	한양도성도감-6618
결재일자	2020.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
백영기	代왕승찬	06/29 代김종필
협 조

계약기간 연장 검토보고

(남산 회현자락 유적전시관 전기·통신공사)

2020. 6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

계약기간 연장 검토보고

(남산 회현자락 유적전시관 전기·통신공사)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 전기·통신공사」에 대하여 문화재수리 공기연장에 따라 계약기간을 연장처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산 회현자락 유적전시관 전기·통신공사

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 옥외 CCTV 및 전관방송 장비 구매 설치

□ 계약개요

· 계 약 자: ㈜녹천전기,(주)경성네트웍

· 계약금액: **************************************

· 계약기간: 2020. 9. 30.까지

Ⅱ		변경내용

□ 변경사유

- 현장유적전시관 전시관리관 소송 등으로 건축공사의 공사기간이 연장됨에 따라 해당 선공정의 준공에 맞추어 공기조정이 필요하므로 전기 및 통신공사의 계약기간 변경이 필요함

□ 계약기간 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간 (전기·통신)	2019.3.25.~2020.9.30.	2019.3.25.~2021.5.30	건축공정 완료 1개월 후

Ⅲ		처리의견

□ 남산 공원매점의 이전지연에 따른 전시·관리실의 공사기간이 연장됨에 따라 변경일정에 맞추어 전기·통신공사의 공사기간을 연장하고자 함

붙임: 건축 설계변경(공사기간 연장) 검토보고 방침서 1부 .  끝.