투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(안전 분야 건설사업관리기술자 배치 및 용역기간 변경 승인)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도 확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2020-06-30 17:06:16

3. 지 시 내 용

가. 신상도감 2020-102(2020.15.)호와 관련입니다.

나.「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」관련 안전 분야 건설사업관리기술자 배치 및 용역기간 변경 요청사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 향후 설계변경 시 반영하여 주시고 안전관리 등 건설사업관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1) 안전 분야 건설사업관리기술자(상주) 배치

- 배치등급 : 초급

- 배치기간 : 2020.7.1.~2021.6.30.

※ 현장 여건에 따라 배치기간 조정 가능

2) 용역기간 변경(감 93일)

- (당초) 2019.3.4.~2021.10.27. → (변경) 2019.3.4.~2021.7.26.  끝.

주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					06/30 박홍봉
협조자
시행			방재시설부-9149									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	대시민공개