문서번호	정수과-2859
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
정지영		06/30 방진표
협 조
	주무관			박은경

사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역 변경계약 계획

2020. 6.

광암아리수정수센터

(정수과)

사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역 변경계약 계획

환경

「사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역」과 관련하여 운반시간 감소에 따른 변경계약을 시행하여 안정적인 슬러지 처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		계 약 현 황

건 명 : 광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역

계약업체

구분	상호	대표자	주소
처리	㈜씨엔에스	***	인천광역시 남동구 고잔로 61
운반	㈜지앤에스환경	***	인천광역시 남동구 은청로 4-7, 비동 240호

계약기간 : 2020. 6. 1. ~ 2021. 5. 31.(1년)

계약금액(1차) : ***********************************

계약단가 : *******************************************

계약물량 : 4,000톤(1년)

차수	기간	금액(원)	처리물량(톤)
1차	2020. 6. 1. ~ 2020. 12. 31.	***********	*****
2차	2021. 1. 1. ~ 2021. 5. 31.	**********	*****

Ⅱ		변경계약 내역

관련근거 : 광암아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역 계약특수조건 제20조 제4항

‘계약상대자의 정수처리오니 운반거리 또는 운반시간이 정수센터가 운반비 산출 시 기준으로 사용한 운반거리 또는 운반시간보다 감소되는 경우, 정수센터는 감소된 거리 또는 시간으로 운반비를 재산출한 후 낙찰률을 곱한 금액으로 계약금액을 감액할 수 있다.’

변경사유 : 처리장소 변동으로 인한 운반시간 감소에 따른 운반비 재산정

- 당초(설계) : 한일시멘트(주) (충북 단양군 매포읍 매포길 245)

- 변경(낙찰) : ㈜씨엔에스 (인천 남동구 고잔로 61(고잔동380))

계약단가 변경내역

구분	당초(계약)	변경	변동사항	비고
운반시간(분)	*****	*****	******
운반단가(원/톤)	******	******	*******
처리단가(원/톤)	******	***	****
계약단가(원/톤)	******	******	*******	부가세포함

운반비 감소에 따른 계약금액 변경내역                       (단위:원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비고
총용역비		***********	***********	***********
차수별	1차 (’20.6.1.~’20.12.31.)	***********	***********	***********
	2차(2021) (’21.1.1.~’21.5.31.)	**********	**********	***********

Ⅲ		행정사항

변경계약 의뢰 – 행정관리팀

붙 임: 1. 운반비 산출내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.