문서번호	급수설비과-5890
결재일자	2020.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
이재학		유동수	06/30 이규상
협 조

소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역 주간 실적 보고

2020. 6. 30

상수도사업본부

(급수설비과)

『 소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물)  건설사업관리용역 주간 실적 보고

소규모 상수도공사(급수,·누수복구·시설물)의 건설사업관리용역에 대해 용역사 로부터 제출된 주간실적을 검토하고 결과 보고 드림.

Ⅰ. 현  황

용 역 명	강서·남부·강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리용역	동부·북부·강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역	중부·서부지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역
용역개요	급수공사 : 15,676건 누수복구 : 15,090건 시 설 물 : 4,742건	급수공사: 13,032건 누수복구: 14,568건 시 설 물: 6,420건	급수공사: 10,526건 누수복구: 12,706건 시 설 물: 4,038건
용역기간	’19.6.22~’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21
총 계약금액 (2차수 금액)	5,165,859천원 (2,506,072천원)	4,906,503천원 (2,379,921천원)	3,919,833천원 (1,914,412천원)
용 역 사	㈜건양ENG 대표이사 김종문 ㈜한국종합기술 대표이사 이상민	㈜이준ENG 대표이사 이승헌 ㈜ 천일 대표이사 김창욱	㈜대한콘설탄트 대표이사 이영민 ㈜한국종합ENG 대표이사 한명웅
과업내용	급수공사, 누수복구공사, 시설물공사, 간선배관공사에 대한 시공감리

(단위: 명)

인력배치 현황		계	강서	남부	강남	동부	북부	강동	중부	서부
투입 인원	계	77	28			27			22
	책임기술인	3	1			1			1
	기술지원기술인	3	1			1			1
	상주기술인	71	9	11	6	10	9	6	11	9
담당부서			급수설비과			누수방지과			시설관리과

Ⅱ. 금주 주요실적 보고

≪서울시 관내 총괄≫

□ 추진기간: 2020.6.15. ~ 6.21.

□ 추진실적

구 분		건설사업관리기술인			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상 건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		302	300	2	99.3	1,625.6	1
누계	‘20.1.1. 이후	6,178	6,118	60	99.0	22,068.1	24
	‘19.6.22. 이후	16,187	16,015	172	98.9	62,642.9	62

- 세부내용

구 분	지시 (시공건수)	건설사업관리(건수)						상수도관부설(m)			시정지시(건수)
		계	신설	구경 확대	폐전	개량	기타	계	50mm 이하	80mm 이상	계	서면	구두
금주	302	302	31	85	37	132	17	1,625.6	907.8	717.8	1	0	1
‘20.1.1. 이후	6,178	6,178	1,002	1,503	735	2,566	372	22,068.1	13,312.7	8,755.4	24	0	24
‘19.6.22. 이후	16,187	16,187	2,510	3,677	1,425	7,560	1,015	62,642.9	34,990.4	27,652.5	62	1	61

※ 불용관 정비현황

구 분	횡방향불용관(기존분기점)폐쇄						진행중	종방향 불용관			개량대상 배수관
	계	맹새들	새들 잠금	재사용	맞이음	기타		발견	폐쇄	진행중
금주	131	0	95	13	21	2	0	0	0	0	0
‘20.1.1. 이후	2,611	16	1,886	264	332	113	0	0	0	0	3
‘19.6.22. 이후	6,435	46	4,488	625	744	532	0	2	2	0	6

○ 포장복구공사(건설사업관리기술인)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장복구업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)
금 주	192	186	96.9	46	46	100.0	146	140	95.9
누 계	3,854	3,599	93.4	848	848	100.0	3,006	2,751	91.5

- 세부현황

구분	총괄							급수업체 복구					포장복구업체 복구
	지시 건수	완료			미복구			지시 건수	완료			미 착공	지시 건수	완료			미복구
		계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층		계	현장 감독	사후			계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층
전주	3,662	3,662	3,413	249	0	0	0	802	802	802	0	0	2,860	2,860	2,611	249	0	0	0
금주	192	192	186	6	0	0	0	46	46	46	0	0	146	146	140	6	0	0	0
누계	3,854	3,854	3,599	255	0	0	0	848	848	848	0	0	3,006	3,006	2,751	255	0	0	0

○ 건설사업관리기술인 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소 간
	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물
금주(회)	10	6	0	4	10	6	0	4	0	0	0	0
누계(회)	104	61	6	37	104	61	6	37	0	0	0	0

○ 누수복구 공사

구 분	시행 건수	건설사업관리 건수
		입회건수	비율(%)	이첩(노후관)	1일 1인 건수
누계	9,035	8,505	94.1	63	2.8
금주 실적	427	399	93.4	4	3.2
전주까지 계	8,608	8,106	94.2	59	2.7

○ 시설물 공사

구 분	건설사업관리 건수			현장입회율 (%)	업무지원 (건)	시정조치 (건)
	계	현장입회(건)	사후확인(건)
누 계	3,523	3,507	16	99.5	125	35
금주 실적	207	207	0	100.0	7	4
전주까지 계	3,316	3,300	16	99.5	118	31

붙임 : 주간실적 보고 요약(용역사→본부) 1부(별도). 끝.