투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	별내선(2공구) 건설사업관리용역 물가변동에 따른 계약금액 변경의뢰(총괄 3회, 3차 1회)

1. 도시철도사업부-6595호(2020.6.30.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 「별내선(2공구) 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역」의 물가변동에 의한 계약금액 조정(총괄 3회, 3차1회)을 위하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 별내선(2공구) 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역

나. 계약금액 : 총괄 5,940,005천원(3차 1,210,000천원)

다. 용역기간 : 2017. 8. 23 ~ 2023. 10. 31(3차:2019. 12. 13 ~ 2020. 12. 24)

라. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

마. 용역계약 변경

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증·감	비고
총괄	금액	5,940,005	6,246,000	(증) 305,995
	기간	2017.8.23.∼ 2023.10.31.		변경없음
1차	금액	1,210,000	1,298,900	(증) 88,900
	기간	2019.12.13. ∼ 2020.12.24.		변경없음

바. 변경사유

- 물가변동(ES)에 따른 계약금액 변경

사. 예산과목

- 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업, 별내선(8호선연장)광역철도건설사업, 감리비(균특보조금)

- 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업, 별내선(8호선연장)광역철도건설사업, 감리비(자체재원)

붙임 :  1. 방침서 1부.

2. 별내선(2공구) 설계변경내역서(총괄3회, 3차 1회) 각 1부.

3. 합의 각서 각 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	신명철		동북선2과장	이용주		도시철도사업부장	06/30 최병훈
협조자	주무관	왕태현		재무예산과장	홍은미
시행	도시철도사업부-6611	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7305	/	mcshin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)