“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	용역변경계약 체결 보고 및 통보(2019년 은평구관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

시설관리과-11251(2020. 6. 26.)호 용역 계약 변경 의뢰에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고하고 발주부서에 통보합니다.

1. 계 약 건 명 : 2019년 은평구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역(장기계속)

2. 계 약 상 대 : 광일토건환경(주) (대표 : 박노일)

3. 변경계약일 : 2020. 6. 30.

4. 변 경 내 역

구분	계약 변경 정보		증감/비고
	당초	변경
총부기계약금액	478,027,700원	459,386,400원	감 18,641,300원
금차계약금액	101,992,700원	83,351,400원	감 18,641,300원
기 간 변 경	2020. 6. 30. 까지	2020. 6. 30. 까지	변동없음

※ 세부 변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감		규격
폐기물 운반	*********	*********	*	**********	****
	*********	*******	*	**********	*****
	*********	**********	*	*********	***
폐기물 처리	*	*	*	*	********
	**********	**********	*	**********	****
	**********	*********	*	***********	****
	**********	**********	*	**********	***
부가세 및 기타	**********	**********	*	**********
합 계	101,992,700	83,351,400	감	-18,641,300

5. 변 경 사 유 : 시공 물량 증·감에 따른 처리물량 증감

6. 보증서 등 추가 수납 : 감액 변경 계약으로 추가 없음

붙임  1. 변경 계약서 1부.

2. 계약 체결 서류 각 1부.

3. 변경계약 의뢰 공문 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	구자람		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	박달경		서부수도사업소장	06/30 代박달경
협조자
시행	행정지원과-12554	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	0231463551	/전송	0231463578	/	spirit24@seoul.go.kr	/	부분공개(7)