문서번호	한양도성도감-6833
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화본부장
왕승찬	곽동진	안중호	07/02 유연식
협 조

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(1차) 준공보고

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(1차) 준공보고

2020. 7.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(1차) 공사완료 보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사」1차 계약분에 대한 공사를 완료하고 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m

· 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사

□ 계약개요

· 계 약 자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜

· 계약금액: ￦2,905,883,010원(총차 ￦4,036,442,760원)

· 공사기간(1차):’18.11.19.~’20.6.19.(총차 ’18.11.19.~’21.4.8.)

Ⅱ		추진경위

□ ’18.11.19. : 문화재수리 공사 및 문화재(상주)감리용역 착수

□ ’19. 2.13. : 건설폐기물 처리용역 착수

□ ’19. 3.21. : 문화재수리 기술지도단 자문회의(문화재청 추천 4인)

- 발굴유구 보존처리에 대한 기술자문

□ ’19. 3.26. : 전기·통신공사 착공

□ ’19. 5.14. : 문화재수리 기술지도단 자문(문화재청 추천 3인)

- 성곽유구 상부 경사면처리 및 분수대 하부 경사면 보강방안

- 성곽면석 및 배전터 보존처리방안, 성벽상부 주변 배수방안

□ ’19. 5.29. : 전시설계 용역 착수(전시공사 포함)

□ ’19.4.~6. : 문화재수리현장 시민공개(9회, 시민참여 171인)

□ ’19.  5월  : 남산 공원매점 이전관련 행정심판 및 소송 등 진행

	〈참고〉남산 공원매점 소송 현황
2019.5.22. 행정심판 청구 – 결과: 매점운영자의 청구를 기각함 2019.8.20. 건물명도소송 접수 - 결과: 명도완료후 손해배상 진행중 2020.1.22. 행정소송 청구 – 결과: 2020.6.9. 소송취하 2020.2.21. 명도단행 가처분 접수 - 결과: 2020.5.22. 명도단행 가처분 인용결정

☞ ’20. 6. 8. : 남산 공원매점 이전철거 완료(현재 시굴조사 준비중)

□ 공사 및 감리용역 기간연장 현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사 기간	1차	’18.11.19.~ ’19. 9.30.	’18.11.19.~ ’20. 6.19.	9개월 증가
	총차	’18.11.19.~ ’19.12.10.	’18.11.19.~ ’21. 4. 8.	16개월 증가
감리 기간	1차	’18.11. 9.~ ’19.10. 8.	’18.11. 9.~ ’20. 7.21.	9개월 증가
	총차	’18.11. 9.~ ’20. 1. 8.	’18.11. 9.~ ’21. 3.21.	14개월 증가

□ ’20. 7.2.  : 문화재수리 기술지도단 최종자문(자문의견 공사반영 적정여부 자문)

⇒ 결과: 별도의견 없음

전경현황	성곽유구 보존처리

※ 공사 사진(붙임 참조)

Ⅲ		향후계획

□ 1차 계약분 준공처리

□ 2차 계약내역중 석재 포장공사 등은 야외 유적전시관 시범개장에 차질이 없도록 ’20.7.30.한 우선시공

붙임 1. 1차 계약분 준공사진 1부

2-1. 문화재수리 기술지도단 자문의견에 대한 공사반영 내용 1부

2-2. 문화재수리 기술지도단 자문의견에 대한 공사반영 사진 1부

3. 문화재수리 기술지도단 최종 자문의견서 1부.  끝.