문서번호	여의도공원관리사무소-1714
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	원장	소장
고우용	유재원	07/02 성손준
협 조

선유도공원 유리온실 리모델링 공사

실정사항 검토 보고

2020. 6.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

선유도공원 유리온실 리모델링 공사 실정사항 검토 보고

선유도공원 유리온실 리모델링 공사 시행 중 현장 여건 변동에 따른 설계 변경사항이 발생하여 실정사항 검토 및 추후 설계변경에 반영하고자 보고 드림

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 선유도공원 유리온실 리모델링공사(조경)

○ 위    치 : 서울시 영등포구 선유로 343(선유도공원)

○ 기    간 : 2019. 12. 4. ~ 2020. 10. 8.

○ 내    용 : 황토 포장, 데크관찰로, 수목 식재 등

○ 공 사 비 : *******************************

○ 도 급 자 : *****************

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 사유 : 현장여건 변동에 따른 식재 및 포장공 변경사항 설계반영

○ 설계변경 내용

구분	현황 및 변경사유	변경내용	비고
포장공사	▶ 황토포장 : 연못 축소로 인한 포장 증가 ▶ 경계석 : 연못 축소 및 식재대 추가에 대한 경계석 증가 ▶ 디딤석 : 연못 부분 징검다리 대신 디딤석 설치 ▶ 데크 관찰로 : H-beam 기둥에 저촉되어 위치 조정 및 기계실 출입문 데크 포장 확장	▸황토포장 : 83㎡ → 90㎡ ▸경계석 : 77m → 80m ▸디딤석 : 8EA → 15EA ▸데크관찰로 : 35.26㎡ → 37.64㎡
시설공사	▶ 연못 : ·온실 천장 설비 정비 시 사다리 설치를 위하여 디딤돌 설치 면적 필요하여 면적 축소 ·수조의 한강물 유입은 겨울철 25℃ 이하 온도로서 부적절하며 녹조 발생 우려되어, 가온기 및 상수도 유입시설 필요 ·기존 논흙은 부패 우려 있어서 방수 시트 위에 돌쌓기로 처리 필요 ·수련 플랜터 설치	▸연못 : 37.0㎡ → 22.0㎡ ▸상수도 유입 시설 : ·수중 모터 및 급배수관:0식 → 1식 ·가온기 : 0EA → 1EA ▸돌쌓기 공법으로 변경 : ·부직포 : 80㎡ → 50㎡ ·방수시트 : 0㎡ → 30㎡ ·논흙 : 10㎥ → 0㎥ ·누름몰탈 : 0㎥ → 2㎥ ·와이어메쉬 : 0㎡ → 10㎡ ·호박돌 : 11.6ton → 6.63ton ·자연석 : 14.26ton → 17.54ton ·디딤돌 : 10EA → 0EA ▸수련 플랜터 : 0EA → 10EA

식재공사	▶ 연못 축소로 인한 식재 면적 추가로 수목 증가	▸떡갈잎고무나무 (H4.0×R15) : 0주 → 1주 ▸콩고 (H0.8×W0.8) : 5본 → 6본 ▸사군자 (H2.5×W1.0) : 2주 → 3주
자재대	▶ 경계석 증가로 인한 물량 증가	▸레미콘 1.83㎥ → 1.95㎥ ▸잡석 8.63㎥ → 9.36㎥

□ 향후계획

○ 공사 추진 중 현장여건에 따라 발생한 변경사항 및 제경비 정산을 공사비 금액 변동 없이 설계반영 조치하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.