문서번호	디자인정책과-7556
결재일자	2020.7.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	디자인정책팀장	디자인정책과장
박병규	김남수	07/03 이혜영

「공공안내체계 유니버설디자인 개선 사업」

관련부서 회의 결과 보고

2020. 7.

문화본부

디자인정책과

-공공안내체계 유니버설디자인 개선 사업-

관련부서 회의결과 보고

「공공안내체계 유니버설디자인 개선 사업」의 부서간 업무협조 사항 논의 및 향후 사업추진 계획에 대한 관련부서 회의를 개최하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일  시 : 2020. 6. 30.(화) 14:00

○ 장  소 : 서소문청사 별관1동 5층 디자인정책과 회의실

○ 참석자 : 14명

- 서울시 : 디자인정책과(디자인정책팀장, 공공디자인팀장, 담당자),

자치행정과(특별교부금 담당)

- 금천구 : 도시계획과장(이원희), 도로과장(진학성) 외 5명

- 용역사 : 더디엔에이 대표(민영삼) 외 1명

- 전문가 : 서울시 공공디자이너(황규연)

○ 회의내용

- 부서간 업무협조 사항 논의 및 향후 사업추진 계획 공유

Ⅱ		사업개요(서울시)

○ 대 상 지 : G밸리(서울디지털산업단지) 2, 3단지 일대

○ 사업내용 : 유형별 길찾기 시스템 디자인 개발 및 배치체계 구축

○ 사업기간 : 2019. 5. 7. ~ 2020. 9. 30.

○ 계약금액 : 550백만원

Ⅲ		주요추진 경위

○ ’18.10.23 : 시장방침(G밸리 UD 테스트베드 조성 종합계획)

현황진단 UD 통합안내사인 개발		사업추진 (통합안내사인 제작·설치)		사업결과 및 정산보고		G밸리 전체 적용
市 문화본부		금천구		금천구→市 문화본부		금천구,구로구,산단공,민간

○ ’18.10.24 : 시장 방침 송부(서울시→금천구 도시계획과)

○ ’18.10.25 : 금천구청장 보고

○ ’18.10.29 : 특별교부금 30억 교부(서울시 자치행정과→금천구)

사업명	G밸리 유니버설디자인 시범거리 조성(시·구 공동사업)
사업내용	UD 공공가로 시범사업	1,500백만원
	UD 공개공지 시범사업 확산	900백만원
	UD 통합안내사인 시범사업	600백만원
합 계		3,000백만원

※ 교부조건 - 사업추진 시 서울시 디자인정책과와 협의 후 의견 반영

○ ’19. 5.23 : 용역 착수(市디자인정책과 사업)

○ ’19. 8.22 : 중간보고회(금천구 참석)

○ ’19. 9.26 : 자문회의(금천구 참석)

○ ’19.11.13 : 설치 및 제작 내역서 송부(서울시→금천구 도시계획과)

- 시방서(LED, 음향신호기 사양 포함) 및 설계내역서(총공사비)

○ ’19.12. 5 : 자문단 검증 및 아이디어 워크숍(금천구 참석)

○ ’19.12.26 : 금천구-시공업체(지승종합건설) 계약

○ ’20. 1.17 : 공사시행 업무이관(금천구 도시계획과→도로과)

○ ’20. 1.30 : 서울시 공공디자인진흥위원회 심의(조건부 동의)

○ ’20. 3.11 : 실무회의(금천구 참석)

○ ’20. 3.12 : POI 검토 회신(금천구 도시계획과→서울시)

○ ’20. 3.31 : 실무회의(금천구 참석)

○ ’20. 4. 7 : ‘실시설계용역추진 협조 요청’(금천구 도로과→서울시)

○ ’20. 4.20 : ‘G밸리 공사관련 협조 요청’(금천구 도로과→서울시)

○ ’20. 5. 6 : G밸리 현장조사(서울시, 금천구, 용역사)

○ ’20. 5. 8 : 한전 금천지사(전력공급부) 업무협의(서울시, 용역사)

- 가로등 및 한전 분전함에서 전기인입 가능 확인 후 금천구 유선전달

○ ’20. 5.19 : ‘실시설계 관련 업무협조 요청’(금천구 도시계획과→서울시)

○ ’20. 5.29 : ‘사업추진 재검토 요청’(금천구 도로과→서울시)

- 6.15.까지 설계도서 송부 요청

○ ’20. 6. 9 : ‘단계별 사업추진 검토 요청’(금천구 도시계획과→서울시)

○ ’20. 6.10 : ‘안내표지판 설계도면 송부’(서울시→금천구)

- 결과보고서, 설치위치도, 지도 및 사인 POI, 설계도면, 시방서, 디지털화면 서비스 정책서, 산출내역서

Ⅳ		회의내용

① 안내표지판 설치 개수

구분	종합 안내표지판	보행 안내표지판	보행보조 안내표지판	안심 안내표지판	합계
공공디자인 심의 (’20.1.30.)	6	36	66	66	174
	42
설계도면 송부 (’20.6.10.)	3	24	70	47	144
	27

※ ’20. 3. 11. 실무회의 시 금천구 의견(설치개수 과다) 반영 후 개수 축소

→ UD 관점의 정보제공 연속성을 위해 설계(안)대로 설치 필요(일부 조정 가능)

② 전기인입 위치

○ 한전 협의(’20.5.8.) 결과, 가로등 및 한전 분전함 전기인입 가능 확인

→ 금천구 도로과) 안내사인 전력량 검토 및 한전 협의 통한 전기인입 방안 마련

③ 공사비용 적정 여부

○ 금천구 추정 사업비 1,500백만원(안내표지판 600, 굴착복구비 800, 선로공사 100)

○ 적산 전문업체 산출 금액(안내표지판 제작·설치 비용) : 504백만원

※ 위 금액에는 전기선로 길이, 굴착 깊이 등 현장상황은 반영되지 않았으나, 안내사인 대부분이 가로등에 인접해 있어 굴착비용 거의 없음

→ 대규모 굴착공사를 수반하지 않아 예산 범위 내에서 시공 가능

④ 배치 실시설계 주체

배치 실시설계도면 : 관련 부서(기관) 협의, 사유지 동의, 지중매설물 및 전기인입 검토 등을 통해                             작성된 현장시공에 필요한 상세도면

○ 실시설계 시 고려사항

- 관련 부서(기관) 협의 : 가로등(금천구 도로과), 전신주(한전), 신호등(경찰서), 통신망 및 유지관리(홍보디지털과) 등

- 지중 매설물 확인 : 전기선, 가스관, 통신시설 등 지하 지장물 유무 검토(굴착신고 및 실제 시공 시 진행)

- 설치 위치의 토지 소유권 검토 : 국·공유지 대지사용 승낙 및 사유지 소유자 동의

- 실시설계 비용 및 소요기간 : 약 3~4천만원, 약 2개월 소요

배치 실시설계는 관련부서 협의, 현장시공 여건 확인 등이 필요한 사항으로 자치구에서 진행하는 것이 현실적이며 효율적임

→ 금천구에서 실시설계 진행(토목공사와 정보통신공사 분리 발주)

⑤ 공사기간 적정 여부

- 연내 시공 가능[실시설계 2개월(7~8월), 제작·설치 3개월(8~10월), 설치 1개월(11월)]

→ 우기, 동절기로 공사기간 연장 필요 시 특별교부금 재편성(금천구 기획예산과) 통한 사업기간 연장 검토

Ⅴ		향후계획

○ 서울시(안내표지판 샘플설치)

- 샘플설치 경과 등을 반영하여 본 설치작업에 반영(금천구)

샘플설치 위치 선정		샘플제작		샘플설치
’20. 7월 초		’20. 7월 중순~8월 중순		’20. 8월 말

○ 금천구(안내표지판 설치)

배치 실시설계		안내표지판 제작·조립		안내표지판 설치
’20. 7~8월		’20. 8~10월		’20. 11월

※ 해당 사업에 대해 금천구청장 보고(금천구 요청) 예정(7월 중)