노후포장도로 정비공사(성동1구역) 작업 현황 보고(7.3~7.4)

주무관	도로보수과장			결재
최우람	07/03 이수범
협 조

문서번호 :	도로보수과-3361

□ 현재 현황

포장계획	전회까지 실 적	금번계획 (7.3~7.4)	누 계	현 재 공정률	예 정 공정률	비 고
1,181.3 a	416.0 a	21.0 a	436.5 a	35.2 %	37.0 %

□ 공사 계획 [2020. 7. 3(금) 22시 ~ 7. 4(토) 06시]

구 분	노선명	위 치	규 모	시공사 및 현장소장	담당자 및 감리원	비 고
7.3(금) 22:00 ~ 7.4(토) 06:00	사가정로 (동대문구)	전농우성A 3동 앞 → 배봉육교 (시외방향)	B=7.1~10.4m L=200m A=21.0a (t=12.5㎝)	㈜연우 현장대리인 최병철 *************	도로보수과 최우람 02-2210-1566 ************* 감리원 윤기상 *************	WC-3 :5.0㎝ (호성) 순환BB-2 :12.5㎝ (호성)

□ 공사 추진현황

○ 붙임문서 참조

□ 교통통제

노 선 명	위 치	통 제 방 법	통 제 시 간	비 고
사가정로 (동대문구)	전농우성A 3동 앞 → 배봉육교 (시외방향)	시외방향 2~3개 차로 중 1개 차로씩 부분통제	2020. 7. 3(금) 22시 ~ 7. 4(토) 06시	절삭후 덧씌우기

□ 기    타

○ 기상상황

※ 날씨 및 현장여건에 따라 공사 및 교통통제 내용이 변동될 수 있음

붙임  1. 공사추진현황 1부.

2. 공사구간 위치도 1부.  끝.