문서번호	방재시설부-9412
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
유시혁		오열상	07/06 박홍봉
협조	주무관		고병준
	주무관		김광호

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(2차)

예비준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(2차) 예비준공검사 시행계획 보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(2차)」관련 예비준공검사 시행에 대한 계획을 보고드림.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017. 9.13. ~ 2020.12.18.

2차  2017. 9.13. ~ 2020.07.31.

○ 계약금액 : 총괄 18,139백만원(2차 12,937백만원)

○ 시 공 사 : 엘림종합건설㈜ 외 2개사(삼보종합건설㈜, ㈜성도건설)

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 2개사(동부엔지니어링㈜, ㈜범창종합기술)

Ⅱ		예비준공검사 개요

○ 건    명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 (2차계약분)

○ 일    시 : 2020.7.8.(수) 14:00 ~

○ 참 여 자

- 검사자 : (토목분야)시설6급 김광호·시설7급 유시혁, (건축분야)시설7급 고병준

- 입회자 : 기술지원기술자, 책임건설사업관리기술자 등

○ 준비사항 : 정산 설계도서, 준공 체크리스트

○ 예비준공검사 내용

- 준공 기한 내 준공가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 책임기술자가 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의한 검사

- 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

⦁ 준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

⦁ 공사 시공시의 건설사업관리단에 비치된 제기록에 대한 검토

⦁ 품질시험⦁검사 성과 총괄표 내용

⦁ 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정성 여부

⦁ 책임건설사업관리기술자가 제출한 품질시험 검사 검토서 내용

⦁ 기타 검사자가 인정하는 사항

※ 검사자는 시공된 부분이 시공 후 매몰되어 사후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 건설사업관리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

Ⅲ		향 후 계 획

○ 예비 준공검사 후 보완사항은 시공자에게 보완 지시하고, 준공검사 시        이를 확인할 수 있도록 건설사업관리용역업자 대표자에게 검사결과 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 책임건설사업관리기술자의 확인을 받은 후 준공 검사원 제출

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.