문서번호	시설관리과-16229
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
강무진	김대용	유동수	07/06 이재호
협 조
	주무관		황대룡
	급수운영팀장		이상환
	급수관리팀장		代황대룡
	시설운영팀장		박종일
	주무관		유광창
	주무관		노운학

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020년 용마배수지외 2개소 정밀안전점검

용역 공정 및 추진사항 보고

2020. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 용마배수지외 2개소 정밀안전점검

용역 공종 및 추진사항 보고

「2020년 용마배수지외 2개소 정밀안전점검 등 용역」에 대한 공정 및   용역 추진 사항을 보고 드림.

※ 코로나-19 「지방공무원 생활 속 거리두기 복무지침」에 따른 서면 공정보고

▢ 용역개요

○ 용역명: 2020년 용마배수지외 2개소 정밀안전점검 등 용역

○ 계약자: ㈜수이앤씨 대표 조한성

○ 용역기간: 2020. 2. 11 ~ 2020. 11. 30

○ 용역개요

- 정밀안전점검(3개소): 용마배수지, 용마(소)배수지, 용마올림터

- 내진성능평가(3개소): 용마배수지, 용마(소)배수지, 용마올림터

○ 계약금액: 45,290천원

○ 공정률: 51%(2020. 6.30. 현재)

▢ 추진현황

○ 시설물 현황

- 정밀안전점검

구 분		용 량	준공연도	시설개요	종별
정밀안전 점검	용마배수지	80,000㎥	2002년	◦배수지 : 4지	1종
	용마소배수지	6,000㎥	2002년	◦배수지 : 2지	1종
	용마올림터	14,000㎥/일	2002년	◦용마배수지에 포함

-내진성능평가

구 분		용 량	준공연도	시설개요	종별
내진성능 평가	용마배수지	80,000㎥	2002년	◦배수지 : 4지	1종
	용마소배수지	6,000㎥	2002년	◦배수지 : 2지	1종
	용마올림터	14,000㎥/일	2002년	◦용마배수지에 포함

- 위치도

- 현황사진

용마 배수지
용마(소) 배수지
용마 올림터

○ 용역 추진내역

- 03월 30일: 용역착공 및 용마가압장 현장답사 및 기본 조사

- 04월 03일 용마소배수지 유출입변실(관랑) 현장조사 실시

- 04월 17일 용마가압장 기전설비 현장조사 실시(외부전문가 초빙)

- 05월 25일 용마배수지(3지) 현장조사 및 비파괴시험 실시

- 06월 02일 용마배수지(4지) 현장조사 및 비파괴시험 실시

- 06월 04일 용마(소)배수지(1지) 현장조사 및 비파괴시험 실시

- 06월 05일 용마(소)배수지(2지) 현장조사 및 비파괴시험 실시

- 06월 23일 용마배수지(2지) 현장조사 및 비파괴시험 실시

○ 주요 공정현황

시설물 외관조서	전기설비 저항 측정	슬래브 두께 제원측정

배수지 벽면 용탈 시험	벽면 비파괴(피복측정) 시험	벽면 비파과(탄산화) 시험

○ 보수보강 내역 및 개략공사비(붙임3 세부 산출내역)

(단위: 천원)

구분	용마 배수지	용마올림터	용마(소)배수지
347,206	232,730	101,520	12,956

○ 잔여 공정

- 우천 시 용마배수지 관랑실 신축이음부 누수 확인

- 현장조사 미비구간 추가 보완조사 실시

- 용마배수지(1지) 내부 방식공사 실시에 따라 공사와 병행점검 예정

▢ 향후계획

○ 2020. 7.: 2021년도 사업 예산 요청(본부 시설과)

○ 2020. 9.: 외부 전문위원 참석 최종 보고회 개최

○ 2020. 11.: 용역준공

붙임 1. 공정보고서 1부.

2. 공정현황 사진 1부.

3. 보수 보강 개략공사비 산출 내역 1부.  끝.