문서번호	기전과-3681
보존기간	년
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	07/06 변봉섭
협 조
	주무관			조소현

2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토보고(1차)

2020. 7

남부도로사업소

(기  전  과)

2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 검토보고(1차)

도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대하여 시공물량 증․감 에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 관련규정

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 계 약 자 :****************

❍ 공사기간 : 2020.02.21 ~ 2020.12.30.

❍ 계약금액 : *************

□ 추진경위

❍ 2020. 2.04.	공사발주

❍ 2020. 2.21.	공사착공

❍ 2020. 4.03.	제1차 작업지시

- 등기구 세척(터널 812등, 지하차도 10등, 가로등 327등)

❍ 2020. 4.27.	제1차 작업지시 완료

❍ 2020. 5.19.	제2차 작업지시

- 소화기표시등 및 소화기함 설치, 부점등 작업 등

❍ 2020. 6.02.	제2차 작업지시 완료

□ 설계변경 내용

❍ 주요 설계변경 내역

공 종	규 격	수 량		단위	증감	비고
		전	후
가로등 세척		510	365	등	감145
터널등 세척		502	813	등	증311
지하차도등 세척		606	18	등	감588
소화기표시등 설치 및 교체		-	36	개	증36

❍ 1, 2차 작업완료에 따른 시공물량 내역조정 : 설계변경 내역서 참조

❍ 설계변경 금액 : ********

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증, 감액	비고
도급비	***********	***********	-

□ 보고자의견

❍ 제1차 및 2차 작업지시 완료에 따른 현장여건에 맞게 작업물량 증․감을 반영한 사항으로 설계변경 시행함이 타당하며,

❍ 설계변경 후 작업완료분에 대하여 제1회 기성을 지급하고자 함.

□ 향후계획

❍ 2020. 7.07.	설계변경 시행

❍ 2020. 7.15.	기성준공

********************************

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.