문서번호	설비부-9707
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		오삼록	07/06 이달영
협 조

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

실정보고(관급자재)사항  검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.07.

도시기반시설본부

(설비부)

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

실정보고(관급자재)사항  검토 보고

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』 관급자재 조달구매 변경사항에   대하여 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 공사명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11.~’20.08.31.(1차 : ‘19.01.11.~’20.07.31.)

□ 공사비 : 도급액 금1,069,240747원(1차 : 금532,000,000원)

□ 감리사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜대한콘설탄트, ㈜트래픽스

□ 시공사 : ㈜유니시스엔지니어링

□ 공정율 : 80 %

Ⅱ		관련근거

□ 관급자재 납품수량 변경 요청 (책임건설사업관리기술자)

○ 창덕궁감 2020-176(2020.07.01.) : 관급자재8건

○ 창덕궁감 2020-178(2020.07.02.) : 신호제어기

․ 신호제어기 경찰청 교통규제심의 결과 변경사항 반영

․ 사업계획 변경(돈화문11길, 피마길 사업, 서순라길 공원등 취소)

․ 종로구청,낙원상가 시설관리업체, 북부도로사업소 협의 요청사항 반영

Ⅲ		보고내용

□ 관급자재 변경사유

품 명	계약자	납품수량		변경사유	비고
		당초	변경
*** *******	*** ****	**	**	**************** ************************
*** *******	*	**	**	*****************
*** *******	*	**	**	***********************************
***	*	**	**	*********************
********	*** ***	**	**	*****************
********	*** ******	**	**	****************** ************************
********	*	*	*	************************
********	********	*	*	*********************** *********
******	*******	*	*	*************************************
**********	*********	*	*	*******************
**********	*	*	*	************************************	********
***** *******	*******	**	**	********************** *******************	*
***** ****	*	*	*	********************** *******************	*
교통신호등 1면2색	〃	16	10	2개소(아세아빌딩앞,운니동교차로)사업취소 및 낙원상가하부 재사용 감)6신호등	〃

□ 관급자재 수량변경

품 명	계약자	금액(원)			납품수량		납품 기한	비고
		당초	변경	증감	당초	변경
*** *******	*** ****	**********	**********	********	**	**	*	***
*** *******	*	**********	**********	**********	**	**	*	*
*** *******	*	**********	**********	**********	**	**	*	*
***	*	*********	*********	*********	**	**	*	*
********	*** ***	**********	**********	**********	**	**	*	*
********	*** ******	**********	**********	***********	**	**	*	*
********	*	*	*********	*********	*	*	*	***
********	********	**********	**********	*********	*	*	*********	****
******	*******	*********	**********	*********	*	*	*********	*
**********	*********	*********	*	**********	*	*	*********	*
**********	*	*	*********	*********	*	*	*	***
***** *******	*******	*********	*********	**********	**	**	*********	****
***** ****	*	*********	*******	********	*	*	*********	*
***** ****	*	*********	*********	********	**	**	*********	*
*				***********

□ 건설사업관리자 검토결과

○ 상기 검토내용과 같이 관급자재의 납품수량을 변경하고 적기에 수급하여 원활한 공사진행이 가능하도록 함이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 의견

□ 교통규제심의, 사업계획변경, 종로구청 및 낙원상가 시설관리업체 요청사항 반영으로 인한  관급자재에 대하여  변경 구매하고자 함.

첨부  1.  관급자재 납품수량변경 요청(합의서포함) 1부.

2.  교통신호제어기 납품수량 변경 요청(합의서포함) 1부.  끝.