코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	추가 공사요청 및 우기대비 공사장 관리 철저(한양도성 유적전시관)

1. 귀사의 발전과 무사고를 기원드립니다.

2. 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사와 관련하여 관람객의 안전사고 예방과 시설물의 유지관리를 위해 붙임과 같이 알려드리니 안전용 목책 및 유지관리용 디딤석의 설치를 위해 추가공사에 반영하여 2020.7.30.까지 완료해 주시고 해당 공사전 실정보고를 제출해 주시기 바랍니다.

《추가 공사내용》

당 초	변경(추가 공사)	비 고
안전목책 없음 디딤석 없음	안전목책 설치(높이 1.1m이상) 디딤석 설치	관람객 낙하사고 등 예방용 경사지에 유지관리 동선 추가

3. 아울러, 우기철을 대비하여 공사장의 피해발생, 토사유출, 수목 쓰러짐 및 침식 등이 발생하지 않도록 공사장 관리와 공정관리에 철저를 다해 주시기 바랍니다.

붙임: 안전사고 예방용 목책 등 설치계획도 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 감리자-감리원이메일 발송),원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 대표시공자-현장관리인이메일 발송)
주무관	왕승찬		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	07/06 안중호
협조자
시행	한양도성도감-6882	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)