문서번호	건축부-11413
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
이준범		代고병연	07/07 진경은
협조
	주무관		고병연

흙막이 가시설 일부 락볼트 변경시공

실정보고 검토보고

(동북권 아동청소년 예술교육센터 및

강북구 종합체육센터 신축공사)

2020. 7.

도시기반시설본부

(건축부)

흙막이 가시설 일부 락볼트 변경시공  실정보고 검토보고

(동북권 아동청소년 예술교육센터 및

강북구 종합체육센터 신축공사)

당초 설계에 반영되어 있는 흙막이 가시설 어스앵커 시공 계획부분을 굴착계획 TF 자문위원회의 검토 의견에 따라 공사비 절감 및 시공성 향상을 위해 일부 락볼트로 변경시공하고자 실정보고 검토후 보고드림.

※ 관련근거 :동북권CM 20-75(`20. 6. 18.)호

건축부-4662(`20. 3. 16.)호

□ 공사개요

○  공 사 명: 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사

○  위    치: 강북구 미아동 811-2

○  공사기간: 2019. 9. ~ 2022. 9.

○  규모/공사비

- 예술교육센터(시): 지하1층, 지상4층, 연면적 4,725.36㎡

- 종합체육센터(구): 지하2층, 지상2층, 연면적 2,645.89㎡

○ 감리/시공: ㈜근정종합건축 /동서건설주식회사

□ 보고내용

○ 실정보고 사유: 굴착계획 TF자문회의 결과에 따른 공법변경 검토

○ 굴착계획 TF자문위원회 회의개최

- 개최일시: `20. 3. 12.(목)

- 자문위원 공법 변경안 (총5명 자문위원중 3명의견 제시)

구분	변경전	변경후	비고
서울시 사업구간 (TYPE-4)	1~5단: 어스앵커	1~3단:어스앵커 4~5단:락볼트 변경시공
강북구 사업구간 (TYPE-2)	1~7단: 어스앵커	1~4단:어스앵커 5~7단:락볼트 변경시공

※ 관련 근거: 공사관리(굴착계획) TF자문회의 개최 결과 보고[건축부-4662(`20. 3. 16.)호]

○ 평면도

○ 검토 내용

1) 안정성 검토 결과

- 굴착계획 TF자문위원에 참석한 위원들에게 변경도면, 구조계산서, 내역서 등 공법변경 관련서류를 제시하여 검토의견을 받은바 구조 안정성 적정함을 확인함.

※ 자문회의 검토의견서 첨부

2) 공사비 적정 검토

- 단가적용 : 신규비목(낙찰율 및 견적가 적용)

(단위: 원)

품 명	수량	신규비목						적용단가		비고
		낙찰율(81.401%)적용		협의율(90.701%)적용		견적가(100.0%)적용
		단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
락 볼 트	**	*******	**********	*******	**********			*******	**********
설계용역비						**********	**********	**********	**********	******

※ 공사 시공성 개선으로 낙찰율 적용이 타당하다고 사료됨(자문의원 의견 반영)

- 공사비 증감내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증,(△)감	비 고
직접 공사비	***********	***********	***********
간접 공사비	***********	***********	**********
설계용역비	*	**********	**********
공 사 비 계	*************	*************	***********
부가가치세	***********	***********	**********
총 공사비계	*************	*************	***********	****************** *****************

□ 책임감리단 검토의견

○ 일부 어스앵커구간(경암구간)을 락볼트로 변경 시공시 공사비 절감효과와 작업 시공성 개선 및 천공시간 단축으로 인한 시민들의 소음불편 민원절감효과를 기대할수 있음.

○ 구조검토 결과 가시설 안정성에 문제가 없으며, 시공시 암절리 상태에 유의하여 시공토록 현장관리에 철저를 기하겠음.

□ 검토자 의견

○ 책임건설사업관리단으로부터 제출된『흙막이 가시설 일부어스앵커부분 락볼트 변경시공 실정보고 적정성 검토』는 적정하다고 사료되며, 추후 관련 절차에 의거 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자 합니다.

□ 행정절차

○ 자문회의 수당지급

- 지급방법: 본인 개졀계좌 입금(참석수당 70천원/인)

붙임  1. 일부 어스앵커 부분 락볼트 변경시공 실정보고 적정성 검토(감리) 1부.

2. 일부 어스앵커 부분 락볼트 변경시공 실정보고(시공사) 1부.

3. 신규비목 단가적용 적정성 검토(감리) 1부.

4. 자문위원 구조검토 의견서 각 1부.

5. 굴착계획 TF자문회의 결과 회신(공문) 1부.   끝.