문서번호	설비부-9789
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	07/07 이달영
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

전기버스충전 용량 증설 검토

2020. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

전기버스충전 용량 증설 검토

『남산예장자락 재생사업』주된 용도가 버스환승형 주차장으로 운영 계획 결정됨에 따라 운영부서(주차계획과) 요청에 의거 전기버스 충전용 ‘수변전설비’와 ‘버스도착정보 안내 단말기’ 설치 추진하고자 함.

1		사업개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 장애2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : 전체 598억원(설비분야 67억원)

□  공 정 률 : 52%(토목 72%)

2		관련근거

□ 주차계획과-8310(`20.07.03) : 전기충전시설 및 버스안내시스템 반영 요청

3		검토내용

□  전기버스 충전용 전기용량 증설

□ 전기용량 : 600kw(일반부하)→600kw(일반부하)+1500kw(전기충전)

□ 전기충전시설 : 상용 4대 + 예비 1대 (대당 300kw)

□ 전기실 여유공간 이용하여 별도 수변전설비 구성

<주차장 평면도>	<수변전 계통도(변경안)>

□  버스정보 안내 단말기 설치

□ 이용자 편의를 위해 남산순환버스 도착정보안내 표출 단말기 설치

4		추진계획

□  전기용량 증설 실시설계용역 시행

****************************************

****************************************************************************************************************

*******************************************

***************************************************

********************************************************

□  설계 완료 후 설계변경 시행

**********************************************************************************

5		향후 계획

□  `20.8월 : 실시설계 완료

□  `20.9월 : 변경계약 시행

□ `20.9월~11월 : 자재 제작 및 설치

□  `20.12월 : 전기수전

붙임 : 1)운영부서(주차계획과) 관련공문 1부.

2)설계용역 산출내역서 1부. 끝.