문서번호	건축부-11442
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이제관		조영수	전결 07/07 진경은
협 조

『서울공예박물관조성공사』

예비 준공검사 시행계획

2020. 7.

도시기반시설본부

건 축 부

『서울공예박물관조성공사』

예비 준공검사 시행계획

「서울공예박물관조성공사 준공 전 사전 합동점검을 시행하여 준공 일정 및 인계·인수 준비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 위    치  : 종로구 율곡로 3길 4(풍문여고 부지 : 12,829㎡)

□ 규    모  : 지상3층~5층, 건물 6개동, 연면적 10,653.58㎡

**********************************************************

**************************************

***************************************

□ 시 공 사  :아이엠유건설㈜ 대표 김충호 외 2개사

□ 건설사업관리용역사 : 무영씨엠건축사사무소㈜ 대표 조정만 외 2개사

□ 공 정 률 : 91%(내부 마감공사 및 조경공사 중)

Ⅱ		예비 준공검사

관련근거

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

□ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014. 2. 6.)

- 계약금액 10억원 이상 공사, 외부전문가와 합동 예비준공검사 실시

예비 준공검사 실시계획

□ 일시 : 2020. 7. 15.(수), 14:00(※현장 및 참석자 여건에 따라 조정· 변경)

□ 장   소 : 서울공예박물관조성공사 현장

□ 점 검 자(분야별 합동점검)

*************************************

**************************************

******************************************************************************

****************************

※조경분야 향후 별도 시행

□ 입 회 자

- 운영자 : 서울공예박물관

- 건설사업관리단(상주 및 비상주 감리원)

- 분야별 시공사 현장대리인

□ 주요 점검내용

- 공사 내용 중 미비한 사항 사전 보완

- 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

- 정산설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

Ⅲ		행 정 사 항

**********

****************************************

***************************************************************************************

************************

향후계획

□ 2020. 09. 30. : 지적사항에 대한 보완조치 완료 후 준공

□ 2019. 10.     : 준공검사, 시설물 인계․인수 추진

붙임 : 예비준공검사 주요점검표 등 각 1부.  끝.