문서번호	인력개발과-12307
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
김자겸		김형태A	07/07 김현중
협 조
	주무관			김형태B

- 서천연수원 천장마감재 교체공사 -

설계변경(준공정산) 검토 보고

2020. 7.

행 정 국

(인력개발과)

서천연수원 천장마감재 교체공사 설계변경(준공정산) 검토보고

「서천연수원 천장마감재 교체공사」의 설계변경(준공정산) 사항에 대한 변경요청이 접수되어 검토결과를 보고드림(계약금액 감6,741,070원)

□ 관련문서

○ 서천연수원 천장마감재 교체공사 관련 설계변경 및 준공정산 제출

(대광2020-22, ’20.07.02.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서천연수원 천장마감재 교체공사

○ 공사규모: 다산관 1층 갤러리 천장마감재 철거 및 재설치(480㎡) 등

○ 공사기간: ‘20.05.22. ~ ’20.06.30.

○ ******************

○ 시 공 사: (유)대광건설산업(전라북도 군산시 소재)

□ 설계변경(준공정산 포함) 내용

구 분	변경 사유 및 내용	증감액 (원)
****	*******************************	***********
	**************************	*********
	**********************************	*********
*****	***********	*********
****	***********	*********
*****	*****	*********
*		***********

□ 검토의견

○ ‘보험료 등’ 변경(준공정산)

- 시공사의 실 사용실적을 반영한 것으로 적정(감6,741,070원)

□ 설계변경 금액(준공정산)

(단위: 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	*********
도 급 액	***********	***********	***********

□ 조치계획

○ 설계변경(준공정산) 사항에 대하여 계약변경(재무과) 및 준공처리 하고자 함

붙임  1. 설계변경 및 준공정산 제출(시공사) 1부.
2. 설계변경(준공정산) 내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.