문서번호	지역돌봄복지과-13350
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	서해경	07/07 하영태

2020년 확정 기능보강사업 변경 계획(안) [동작]

2020. 7

지역돌봄복지과

(복 지 정 책 실)

2020년 확정 기능보강사업 변경 계획(안) [동작]

2020년 확정 기능보강사업 중 동작종합사회복지관(동작구)의 사업 계획 변경 요청에 따라 검토 하여 승인하고자 함

□ 요청사항

◯ 2020년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(동작구 복지정책과-12833, 2020.6.17.)

◯ 시 설 명 : 동작종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 3층 강당 리모델링 공사

◯ 요청내용 : 세부공사 내용 및 시공내용 변경(가구·천정·전기·벽체·목 공사 등)

□ 사업변경 신청사항

◯ 강당 리모델링에 따른 세부공사 내용 및 시공내용 변경

- 당초 계획대비 추진시 공간 활용을 극대화시키고 이용자의 안전확보 및 사업비의 효율성 증대를 위한 세부사업내역 변경

구 분	기 존	변 경(안)
공사제외	○ 가구공사 : 붙박이신발장·의자쿠션	-
시공방식변경	○ 천장공사 : 페인트칠 마감 ○ 벽체공사 : 패브릭패널취부	○ 수장공사 : 도배마감 ○ 방음공사 : 목모보드(벽체15T)
사업량 증가	○ 천장공사 : 매입등 32개	○ 전기조명공사: 원형매입등 82개
공사추가	-	○ 목공사 : 무대이미지월 강마루, 갤러리도어·문틀, ABS도어·문틀 등

□ 검토결과 - ‘승인’

◯ 검토의견

- 당초 계획 대비 가구공사 및 천정공사량을 줄이고, 방음공사 및 창호공사와 조명 공사량을 늘려 강당의 방음성능을 높이고자 하며, 다양한 프로그램을 운영하여 소음을 유발하는 강당의 특성을 고려할 때 적정한 변경으로 사료됨

- 종합적으로 검토한 결과 사업계획 변경이 당초예산 변동없이 사업목적과 부합하는 등 원활하게 추진될 수 있도록 사업계획 승인함.

◯ 총 사업비 : 52,943천원 → 52,943천원(변동 없음)

※ 변경 세부내역

구 분	당 초	변 경
공통가설	먹메김, 보양(122㎡)외	현장정리
가구공사	붙박이 신발장(6개), 붙박이 의자(23m)	제외
철거공사	패브릭판넬 철거(90㎡), 라디에이터 철거(4개)외, 폐기물처리	붙박이장 철거, 라디에이터 철거(4개), 문짝 철거외, 폐기물처리
바닥공사	데코타일 (강당 110㎡, 무대 25㎡)외	데코타일 (강당 110㎡), 무대 (강마루)외
천정공사	석고보드위 수성페인트, All Putty(122㎡), 천정점검구(3개)외	도배-천정지(방염실크) (125㎡), 천정점검구(6개)외
벽체공사(방음)	패브릭패널(54㎡,방염), 인테리어 필름(91㎡)외	경량벽체(34㎡), 석고보드(138㎡), 목모보드(99㎡), 무대 이미지월(45㎡), 인테리어 필름(107㎡), 실내사인몰
창호공사	목문(2개), 갤러리도어(2개)외	ABS도어(4개), 갤러리도어(4개), 창문공틀(4개)외
전기조명공사	전구색 매입등(32개) 외	LED 매입등(82개)외
냉난방기	천정형냉난방기(2대) 외	천정형냉난방기(2대)외
음향기기	Mixer, Amp, CD플레이어, 스피커외 교체(기존 2009.12/2010.12월)	Mixer, Amp, CD플레이어, 스피커외 교체(기존 2009.12/2010.12월)

붙임 : 1. 사업변경 승인요청 공문(동작구) 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 검토서류 일체 각 1부.