투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	예산 조정(통계목 변경) 요청(강남순환도시고속도로건설)

1. 토목부-13336(2020. 7. 8.) 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로 건설공사의 건설사업관리기술인 투입 인원 조정 등에 따른 부족한 예산(감리비)을 효율적으로 집행하고자 예산 조정(시설비→감리비) 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 예산 변경 요청내역

- 예산과목: 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

- (시설비) 감 203,959천 원 → (감리비) 증 203,959천 원

(단위: 천원)

통계목	2020년 예산			비고
	당 초	변 경	증·감
계	57,100,000	57,100,000	-
시설비	55,550,000	55,346,041	-203,959
감리비	1,550,000	1,753,959	203,959

나. 변경사유

- 8공구 안전 분야 건설사업관리기술인 추가 투입

- 4공구 건설사업관리용역 준공

붙임  통계목 변경 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김구		도시고속도로과장	代이상욱A		토목부장	07/08 김용제
협조자
시행	토목부-13382	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(5)