코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	종로구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	2020년 노후전선 정비사업 사업(예산)계획 변경 승인 안내

1. 서울지방중소벤처기업청 소상공인과-665호(2020.7.7.)와 관련됩니다.

2. 2020년 노후전선 정비사업 2차 선정시장인 **************의 사업계획변경 요청건에 대하여 다음과 같이 승인되었음을 알려드리니 사업추진에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시장: 종로구 **************

나. 사업변경 승인 내용

(단위:천원)

구분	당초					변경
	계	국비 (40%)	시비 (15%)	구비(15%)	민간 (30%)	계	국비 (50%)	시비 (15%)	구비 (15%)	민간 (20%)
사업비	1,246,000	500,000	186,900	186,900	372,200	800,000	400,000	120,000	120,000	160,000
사업내용	지하1층∼1층 1,2456개 점포 승압공사 (변압기 및 저압 배전반 공사 포함)					지하1층∼1층 1,246개 점포 승압공사 (변압기 및 저압 배전반 교체공사 제외)
사업기간	'20. 3. ∼ 7.					'20. 7. 1. ∼ 12. 31.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 변경사업계획서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안승현		시장현대화팀장	이준학		소상공인정책담당관	07/08 강석
협조자
시행	소상공인정책담당관-11540	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 시티스퀘어 16층	/
전화	02-2133-5192	/전송	02-2133-0714	/	seunga0322@seoul.go.kr	/	부분공개(5)