코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	동작구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2020년 확정 기능보강사업 변경요청 결과 통보(동작)

1. 동작구 복지정책과-12833(2020.6.17.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 신청한 ’20년 종합사회복지관 확정 기능보강사업 변경 요청 건에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 결정 세부내용은 [붙임]을 참고하시어 향후 사업 절차 이행 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시 설 명 : 동작종합사회복지관(동작구)

나. 사 업 명 : 3층 강당 리모델링 공사

다. 검토결과 : ‘승인’

- 당초 계획 대비 가구공사 및 천정공사량을 줄이고, 방음공사 및 창호공사와 조명 공사량을 늘려 강당의 방음성능을 높이고자 하며, 다양한 프로그램을 운영하여 소음을 유발하는 강당의 특성을 고려할 때 적정한 변경으로 사료됨

- 종합적으로 검토한 결과 사업계획 변경이 당초예산 변동없이 사업목적과 부합하는 등 원활하게 추진될 수 있도록 사업계획 승인함.

※ 총 사업비 : 52,943천원 → 52,943천원(변동 없음)

붙임 : 2020년 확정 기능보강사업 변경 계획[동작] 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박슬기		복지시설팀장	서해경		지역돌봄복지과장	07/08 하영태
협조자
시행	지역돌봄복지과-13389	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02) 2133-7389	/전송	02) 2133-0719	/	psgg216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)