문서번호	토목부-13336
결재일자	2020.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	07/08 김용제
협조
	주무관		이상욱A

예산 통계목 변경 검토 보고

【강남순환도시고속도로 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

도시기반시설본부

토 목 부

예산 통계목 변경 검토 보고

【강남순환도시고속도로 건설공사】

강남순환도시고속도로 건설공사의 건설사업관리기술인의 투입 인원 조정(안전분야 추가 투입 등)에 따른 부족한 감리비 확보를 위한 통계목 변경(시설비→감리비) 검토 보고임.

1		관련근거

❍ 안전 전담감리 추가배치 검토 보고[토목부-6100(’20. 3. 24.)]

2		공사개요

❍ 위    치 : 금천구 독산동~광명시 소하동~강남구 소하동

❍ 규    모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9km

❍ 사업기간 : ’01. 12. 29. ~ ’24. 12. 31.

❍ 총사업비 : 1조6,573억 원

3		보고내용

❍ 공사장 안전사고 재발방지 대책(행정2부시장 방침 제280호, ’19.10.10.)에 맞춰 강남순환 8공구 안전 분야 건설사업관리기술인 추가투입 등에 따른 예산(감리비) 부족(203,959천 원)

❍ 예산(감리비) 현황

구 분	감 리 비(401-02)		증·감	비고
	당초(예산)	변 경
계	1,550,000	1,753,959	203,959
4공구	450,000	471,959	21,959
8공구	1,100,000	1,282,000	182,000

※ 4공구: 471,959천 원[=467,259(계약금액)+4,700(지출)]

❍ 예산 변경 계획

통계목	2020년 예산			비고
	당 초	변 경	증·감
계	57,100,000	57,100,000	0
시설비	55,550,000	55,346,041	-203,959
감리비	1,550,000	1,753,959	203,959

4		조치계획

❍ 2020년도 강남순환도시고속도로건설 예산 통계목을 변경(시설비→감리비) 하여 금년도 예산을 효율적으로 집행하고자 함.

❍ 사업주관부서(도로계획과)에 통계목 변경 요청

붙임  1. 안전 전담감리원 추가배치 보고서(강남순환 8공구) 1부.

2. 변경계약서(강남순환 4공구) 1부.  끝.