문서번호	보존서비스과-1141
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	보존서비스과장	서울기록원장
김을지	원종관	07/06 조영삼

【2020년 서울기록원 디지털 아카이브시스템 운영 및 유지관리 용역사업】 월 간 보 고 (6월)

2020. 06

서울기록원

(보존서비스과)

【2020년 서울기록원 디지털 아카이브 시스템 운영 및 유지관리 용역사업】

월 간 보 고 (6월)

Ⅰ		사업개요

◌ 사 업 명 : 2020년 서울기록원 디지털아카이브 시스템 운영 및 유지관리

◌ 사업기간 : ‘20.2.1 ~ ’20.12.31 (11개월)

◌ 사 업 비 : 203,500천원(부가가치세 포함)

◌ 사업내용 : 시스템 기능 및 성능개선 및 안정적 운영

Ⅱ		추 진 내 용

◌ 추진기간 : 2020.6.1. ~ 2020.6.30

- 진 척 율 : 계획 54% / 실적 50%

구 분	세 부 내 용	진척율(%)
		계획	실적
보존시스템 기능 및 성능개선	보존시스템 디지안 개편 및 메뉴구성 개편 직원요구사항 처리 및 통계기능 강화 검색엔진 도입 및 검색기능 강화 통계기능 세분화 정부 디렉토리 시스템 연계	54%	45%
서비스시스템 기능 및 성능개선	민원처리 결과 및 이용통계분석, 구글 에널리스틱 개선 알림톡 템플릿 개선 웹접근성 품질마크 획득 기록의 검색 및 탐색속도 개선을 위한 검색엔진 튜닝	54%	54%
안정적 운영 및 유지관리	신속한 장애처리 상용SW 정기점검 서버 및 응용프로그램 모티터링 대용량 자료업로드시 부하 최소화 방안마련 연2회 집합교육, 헬프데스크 운영, 매뉴얼 제공	54%	54%

◌ 세부 추진내용

- 엔진에서 보존복원 기록물 선택시 서고·서가별 선택뷰 구조 개선완료

- 서울기록원 콘텐츠 노출을 위해 네이버 검색 최적화 방법 분석 및 적용

- SDA 홈페이지 이용자통계 분석을 통하여 네이버 서치 어드바이저 등록

· 네이버 통한 서울기록원 콘텐트 노출 향상 기대

- 생산현황통보 서식변경 및 통계변경작업 완료

- 오류 및 개선 요청사항 38건 중 29개 완료

· 작업 진행중(3건), 기술 검토중(6건)

- M/F사업 결과물 메타추가(생산일자) 작업 및 제목수정 진행 중

· M/F 사업팀에서 메타값 추가 후 엔진에 업로드 예정

- 홈페이지 문의사항 처리 : 일반문의(3건), 견학문의(0건)

· 문헌정보학과 학생의 서울기록원 실습가능 여부 문의,

방문불가에 따른 자료열람문의, 민간단체 출판지원 문의

◌ 정보화사업 성과점검 결과

- 근 거 : 전자정부성과관리 지침(행정안전부고시 제2019-3호)

- 성과점검 대상

· 광역 지자체 : 1억원이상 계속, 신규사업 전체

-  성과점검 결과

기 준	목표값	방문자수		비고
		6월	5월
사이트방문자수	1000명 / 월	2,302	2,404

Ⅲ		향 후 계 획

- SDA 엔진 담당자  인터뷰 진행 (7월 초)

· 개선사항 및 ‘21년 추가할 기능관련 협의

- 웹접근성 인증마크 획득을 위한 작업 (8월 중순 심사 예정)

붙임 1. 월간보고서 1부.

2. 업무요청서 (보존시스템, 서비스시스템) 1부

3. 일일시스템 점검 리스트 1부.

4. 장애관리대장 1부.

5. 상용SW 점검내역서 1부.

6. 일일보안점검 리스트 1부.

7. 서울기록원 홈페이지 6월 이용자 통계자료 1부.   끝.