“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행(총차분 3회, 3차분 1회)

1. 낙산및수유6배수(감리) 제20-191호(2020. 7. 6.)호 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인 건설폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고자 합니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 낙산배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)

2) 용역기간 : 총차분 2018.3.14.~2020.7.13.(3차분 2020.1.1.~2020.7.13.)

3) 계약금액 : *********************************

4) 계 약 자 : ㈜동보이앤시 대표이사 김지환

5) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비
[세부사업명 : 낙산배수지 건설공사(21107000)]

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 계약금액

(가) 총차분

(단위: 원)

당 초	변 경	증 ․ 감
***********	***********	************

(나) 3차분(2020년)

(단위: 원)

당 초	변 경	증 ․ 감
**********	**********	************

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 건설폐기물 처리물량을 반영한 설계변경(최종)

붙임 : 1. 건설사업관리자 설계변경 검토 제출 공문 각 1부.
2. 설계변경 합의서 1부.

3. 설계변경 내역서 각 1부.
4. 계약금액조점 심의 결과 1부.  끝.

주무관	박건수		시설과장	송병욱		시설관리부장	07/09 강호광
협조자	주무관	김형식		주무관	이효원		예산팀장	홍경숙
시행	시설과-3792	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3416-1494	/전송	02-3146-1529	/	gunzaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)