투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신]고덕천 교량 공사기간 정보공개 요청

***님 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심과 애정을 가지고 보내주신 소중한 의견에 감사드리며, 우리 부로 이첩된 국민신문고로 제출하신 민원과 관련하여 불편을 겪고 계신 점 죄송하다는 말씀을 드리며, 민원에 대해 답변 드리겠습니다.

하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사 중 고덕천 횡단 교량 설치공사는 당초 교량 구간(강일초교 사거리 ~ 상일동역 사거리) 전면통제 후 일괄시공 계획이였으나, 강동구청 협의결과에 따라 풍수해대책 우기기간(매년 5.15 ~ 10.15) 공사 중지 및 분할시공(1, 2단계)을 진행하고 있습니다.

1단계(대한연세요양병원 측) 구간은 2017.10월 ~ 2018.5월 공사를 진행하여 완료된 상태이며,

2단계(강동드림산부인과 측) 구간은 2018.10월 ~ 2019.5월 기존 가설교량 철거 후, 2019.10월부터 영구 교량을 설치 중으로 2020.10월 개통할 예정임을 알려드립니다.

지하철공사로 인해 불편을 드린 것에 대해 다시 한 번 양해 부탁드리며, ***님의 가정에 늘 행운이 가득하시길 기원 드리겠습니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

서울시 도시기반시설본부 도시철도토목부 한재호 02-772-7126. 끝.

주무관							한재호			궤도과장					07/09 허동
협조자				주무관						이형일
시행			도시철도토목부-7046									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-772-7126						/전송			02-772-7306					/	jh1004@seoul.go.kr												/	부분공개(6)