문서번호	생산관리과-6902
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		신근호	07/13 서대훈
협 조

『2020년도 방수·방식 공사』

현장 방문 계획 보고

2020. 07.

생  산  부

(생산관리과)

『2020년도 방수․방식 공사』

현장 방문 계획 보고

향후 추진할 정수지 방수․방식 사업에 참조코자 우리본부에서 금년도에 추진중인 방수․방식 공사 현장 방분 계획 보고임

□ 정수지 방수․방식 시행 현황

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
계	*****	*****	****	****	********** **********	********** ***********	****
미시행	*****	****	*	****	*	**** ******	*
완 료	*****	**** ***** ******** ******************	**** ********** ******	**** ********** ****** *********** *********************	**** *********** *********** *********** ***********	**** ********* ************	**** ********* ******

□ ’20년도 방수․방식 사업 현황

구 분		계	수도사업소
			남 부	동 부	강 동
배수지(대상지수)		3개소(5개 지)	신림6(2개 지)	용마(1개 지)	길동(2개 지)
방식면적 및 사업비	도막계	30,361㎡ 1,670백만원	6,560㎡ 360백만원	10,062㎡ 554백만원	13,739㎡ 756백만원
	패널계	15,140㎡ 2,046백만원	7,400㎡ 1,000백만원	3,408㎡ 461백만원	4,332㎡ 585백만원
총사업비		6,929	2,679	1,670	2,580
착공일 ~ 준공일			’20.9.(예정) ~ ’21.9.(예정)	2020.7.10. ~ 12.31.	2020. 7.14. ~ 2021. 9.1.
공법선정업체		도 막	*** ****	****** ********	*** ********
		패 널	**** ********	**** ****	***** ****

□ 현장방문 계획

○ 사업대상 배수지별 총 3회 방문

- ①바탕면 보수 전, ②바탕면 보수 및 건조완료 후, ③방수․방식 시공 후

○ 중점점검 사항

- 바탕면 보수 전 : 기존 방수방식 상태, 외부 유입수 유무, 표면 열화 상태 등

- 보수 및 건조완료 후 : 바탕면처리 방식 및 상태, 표면건조 상태

- 방수․방식 시공 후 : 방식재의 부착상태, 코너부 등 시공품질

○ 공사 현장별 점검 계획(현장 일정에 따라 변동될 수 있음)

구 분	방 문 일 정
	신림6 (2개 지) (남부수도)	용마 (1개 지) (동부수도)	길동 (2개 지) (강동수도)
공 사 기 간	’20.9.(예정) ~ ’21.9.(예정)	’20.7.10. ~ 12.31.	’20.7.14. ~ ’21.9.1.
바탕면 보수 전	2020. 9(중).	2020. 7(말).	2020. 8(초).
바탕면 보수 및 건조완료	2020. 10(초).	2020. 9(초).	2020. 9(초).
방수․방식 시공 완료	2020. 12(중).	2020. 12(초).	2020. 12(초).

※ 신림6(남부)와 길동(강동)은 2개지 중 금년도 1개지, 내년도 1개지 시행 예정

□ 향후계획

○ 배수지 방수․방식 추진 현장 방문 결과 분석 및 향후 정수지 방수․방식 사업 추진시 분석 결과 활용. 끝.