(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

공사개요

· 위치: 동대문구 답십리동 553외 1

· 규모: 지하1층/지상4층 2,990.95m2

· 공사기간 : ‘19. 10. 14. ~ ’21. 4. 15.

· 도 급 비 : 498,711천원

· 시공사 : (주)성보전기

· 감리단 : ㈜펨코엔지니어링

실정보고 건명

태양광발전장치 납품기한 연장 검토

실정보고 사유

해당설비 설치위치는 건축물 옥상으로 건축 예정공정표에 따라 기한내 설치 불가

건설사업관리단

검토의견

**************************************************************************************************************************

공기에 미치는 영향

**

변경(안)

○ 계 약 자: 주식회사 코덱에너지

○ 제품규격: 태양광발전장치 28kW

○ 납품기한 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감
전 체	`19. 11. 12. ~ `20. 8 .31.	`19. 11. 12. ~ `21. 4 .15.	증 8개월

○ 계약금액 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감
전 체	73,920,000	73,920,000	변경없음

예산조치 계획	당초 도급비 범위내 시행가능 ( ) 당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ ) 별도(추가) 예산 확보 필요 ( )
추가 행정절차 이행 필요여부	관급자재 납품기한 변경 의뢰(총무부)
발주처 검토의견	**********************************************************************************************
비 고	붙임 태양광발전장치 납품기한 연장 검토 보고 1부. 끝.
결재	주무관	김문호	환경설비과장	김오열	설비부장	07/13 이달영
협조