문서번호	한양도성도감-7133
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
백영기	이원재	07/13 안중호
협 조

납품기한 연장 검토보고

(남산 회현자락 유적전시관 통신공사 관급자재 구매설치)

2020. 7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

납품기한 연장 검토보고

(남산 회현자락 유적전시관 통신공사 관급자재 구매설치)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 통신공사」와 관련한 관급자재 구매설치에 대하여 문화재수리 공기연장에 따른 납품기한 연장처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산 회현자락 유적전시관 통신공사 관급자재 구매설치

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 옥외 CCTV 및 전관방송 장비 구매 설치

□ 계약개요

· 계 약 자: ㈜이노뎁 외 2(주식회사 센텍,(주)아이엠피)

· 계약금액: ********(2019년 이월예산)

· 납품기한: 2020. 7. 30.

Ⅱ		변경내용

□ 변경사유

- 야외 유적전시관(보호각, 조경, 토목공사 등) 공사기간이 연장됨에 따라 조경 및 토목공사와 공종이 중복되어 공기조정이 필요하므로 통신공사의 관급자재 준공(납품)기한 변경이 필요함

□ 납품기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한 (이노뎁,센텍)	2020.7.30.	2020.8.30	30일 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한 (아이엠피)	2020.7.30.	2020.9.30	60일 연장

□ 검토의견

- 문화재수리공사(야외 유적전시관) 준공기한에 맞춰 납품기한을 각각연장하되 최단 시간내에 관급자재를 납품(준공) 완료하도록 하겠음

붙임 1. 납품기한 연기 의뢰서 1부

2. 납품기한 연장요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.