문서번호	설비부-10046
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	代이호기	07/13 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 설계변경 검토보고

2020. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

관급자재(공기순환기) 변경사항 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」공기순환기 관련, 누락 물량(공기순환기 1대) 설치시기 미도래에 따라 납품기한을 연기하고자 검토보고 드림

‣납품기한  : 당초 ’20.7.26. → 변경 ’21.3.24.

‣물량증가 : 공기순환기(250CMH) 1대 및 설치옵션품 (2,350천원 증)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(1차  ’19.10.25.~’20.08.31.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(1차 30,000,000원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 공기순환기 변경계약 및 추가구매 검토보고 : PC20(동대문 실버케어)-283호(2020.07.09.)

Ⅲ		검토내용

□ 계약현황

품명	납품요구번호	금액	납품기한	납품업체
공기순환기 (본품)	****************	***********	**********	****
공기순환기 (옵션)	****************	***********	**********	****

□ 납품기한 연기 및 설계변경

□ 납품기한 연기

- 연기사유 : 밥퍼부지 이전으로 인한 건축 선행공종 지연으로 설치시기 미도래

- 납품기한 변경 : 당초 2020.07.26. → 변경 2021.3.24.

□ 설계변경 내용

- 설계변경 사유 : 설계도면에는 공기순환기가 25대이나, 내역서(계약서)에는 24대만 반영되어 누락된 물량 추가 필요

- 물량증가 : 공기순환기(250CMH) 1대 및 설치옵션품 1식 (2,325,600원 증)

□ 건설사업관리기술자 의견

- 공기순환기의 납품기한은 골조공사가 완료되고 물품 반입 및 설치가 이루어지는 시점을 고려하여 기계공사 총차기간까지 연기하는 것이 타당할 것으로 사료되며,

- 내역서(계약서)에 누락된 공기순환기 등은 설계도면대로 시공하기 위해 추가 반영함이 타당함

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 누락된 물량을 추가 및 설치 가능한 시점으로 납품기한을 연기함이, 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 변경계약 내용

품명	당초		변경		비고
	납품기한	계약금액	납품기한	계약금액
공기순환기 (본품)	**********	***********	**********	***********
공기순환기 (옵션)	**********	***********	**********	***********

붙임 :  책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.