문서번호	방재시설부-9748
결재일자	2020.7.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김규희		이병호	07/13 박홍봉
협조	주무관		김소연
	주무관		김현곤

「낙산성곽길 정비 공사」

설계변경(1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

「낙산성곽길 정비 공사」

설계변경(1회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「낙산성곽길 정비 공사」의 설계변경(1회)에

대한 검토 보고임

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 종로6가 69번지 일대

○ 사업내용 : 서울디자인지원센터~ 낙산정상 한양도성 내측 순성길 정비

- 규  모 : 연장 863m, 면적 15,220㎡, 폭 15m내외

- 내  용 : 하수관․차도 정비, 순성길 정비, 장대석 설치, 주민쉼터 조성 등

○ 공사기간 : 2019. 11. 11. ~ 2020. 11. 09

○ 총공사비 : 2,449백만원 (도급비 1,677, 관급자재비 645, 폐기물처리 127)

○ 도 급 자 : 원택건설(주), 에코아트조경(주)

○ 감 리 자 : 서울시설공단

□ 설계변경 추진경위

○ 2019.11.11. 공사착공

○ 2020.01.14. 실정보고 요청 (도기본 → 서울시설공단)

- 유지관리기관(종로구) 협의사항 반영 요청

○ 2020.03.20. 1차 실정보고 조건부 승인

- 하수관 CCTV 조사 및 GIS DB 구축, 교통소통대책 심의 용역

○ 2020.05.07. 사업계획변경 반영 요청 (도기본 → 서울시설공단)

- 의뢰부서(주거환경개선과) 요청사항 : 이화마을 골목길 구간 제외

○ 2020.05.08. 2차 실정보고 승인

- 폐토사 처리 반영

○ 2020.06.24. 3차 실정보고 조건부 승인

- 하수관로 재질 및 포장재질 변경, 자재 소운반비 반영 등

○ 2020.07.08. 설계변경서 제출(서울시설공단 → 도기본)

□ 설계변경 검토사항

○ 설계변경 사유

- 유지관리 기관(종로구) 및 의뢰부서(주거환경개선과) 요구사항 반영

- 현장실정 고려 기 승인한 실정보고 사항 반영

○ 설계변경 내용

구 분	주요 변경 내용	증 · 감		관련사항
		도 급 비	관 급 비
	*	*********	*********
우수공	***************** *********** *************	*********	*********	방재시설부-8850 (20.06.24)
	************
	************** **********************
	*****************
포장공	*********** ************* **************** ****************	*********	*********	방재시설부-8850 (20.06.24)
철거공	************************* ********************** **********************	*********	*	방재시설부-8850 (20.06.24)
	********** *****************
부대공	**********************************	*********	*	방재시설부-4280 (20.03.20)
경 비	**************** **********	*********	**	방재시설부-4280 (20.03.20)
기타 제비율		*********	********

○ 공사비 증․감액

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
총공사비		*********	*********	*******
도급비	공급가액	*********	*********	******
	부가세	*******	*******	*****
	소 계	*********	*********	******
관 급 비		*******	*******	********

□ 보고자 의견

○ 유지관리부서 요청사항 및 현장여건 등을 반영한 설계변경으로 기 승인된 실정보고와 같이 계약금액 조정이 타당함.

붙임 1) 관련공문 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율검증 1부. 끝.