문서번호	급수운영과-14932
결재일자	2019.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
이승우		최춘근	08/26 조세연
협 조
	시설관리과장			정재현

『2019년 공사장 안전관리 향상을 위한』

상수도 공사 주요사업 공정 보고회 개최

2019. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2019년 공사장 안전관리 향상을 위한』

상수도 공사 주요사업 공정 보고회 개최

2019년도 상수도 공사 주요사업 공정 보고회를 개최하므로써 효율적 공사추진과 품질확보, 안전사고를 미연에 예방하여 조기에 공사완료코자 함.

□ 추진근거

❍’19년 재정 신속집행 추진계획 시행[기획예산과–2169(2019.2.25)]

❍’19년 상수도공사 감독대행 업무보고회  [누수방지과-1983(2.22)

□ 추진목적

❍ 2019년 조기집행에 따른 신속한 사업 추진 대책 마련

❍ 효율적인 공사안전관리 및 공사 품질 확보

❍ 공사장 안전사고 예방활동 강화 및 현장 애로사항 청취

□ 추진계획

❍ 단위사업 공정 보고회

- 장    소 : 사업소 2층 회의실

- 대     상 : 단위공사 8건(배수관(4건), 배·급수관(3건), 무단수급수체계(1건))

- 참 석 자 : 사업소장외 공사관계자

(급수운영과장, 시설관리과장, 공사담당관리관, 시설공단감독, 현장소장 등)

- 보고내용

‣ 공사현장별 추진실적 보고 및 향후 신속 공정추진계획

‣ 현안사항, 건의내용등 조치계획

‣ 공사장별 안전관리 추진활동 및 공사관련 사항

❍ 2019년 주요공사 현황

연번	공 사 명	공사기간	사업비 (백만원)	사 업 개 요	공정률 (%)	시공사	감독청 (보고자)	업무 담당자
1	계	2019년		100~1350mm (L=8751m)	7,166m (81.9%)
1	내곡지구 이중화 배관 부설공사	’19.5 ~ ’19.10	1,209	D=500㎜, L=770m	L= 468m (60.8%)	㈜세웅씨에스	시설공단 (이정복)	전동근
2	한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사	’19.4~ ’19.11	1,566	D=400~700㎜ L=1,100m	L= 730m (66.4%)	송도건설주식회사	시설공단 (최인규)	박홍
3	경기고사거리~봉은사역사거리간 외 1개소 송배수관 정비공사	’19.3 ~ ’19.11	3,779	D=150~1350㎜ L=797m	L= 470m (59.0%)	대일수도(주)	시설공단 (이정복)	김진성 김병주
4	예술의전당교차로~우면삼거리간 송배수관 정비공사	’19.5 ~ ’19.11	2,310	D=700㎜ L=670m	L= 670m (99%)	㈜비성건설	시설공단 (강평구)	강희창
5	사평대로~삼호가든사거리간 송배수관 정비공사	’19.7 ~ ’19.12	2,433	D=1350㎜ L=310m	(횡단굴착) (10%)	웅진코웨이엔텍 (주)	시설공단 (강평구)	최지영
6	대치동 968-3 ~ 984 –4번지외 4개소 배급수관 정비공사	’19.3 ~ ’19.11	1,698	D=200~300㎜ L=1,812m	L=1,748.3m (100%)	주마건설㈜	시설공단 (유현석)	고태우
7	신사동 617-3~ 629-24번지외 5개소 배급수관 정비공사	’19.3 ~ ’19.10	1,645	D=100~300㎜ L=2,012m	L= 1,840m (91.4%)	㈜서홍	시설공단 (최인규)	고원석
8	서초동 1341번지외 6개소 배급수관정비공사	’19.4.22 ~ ’19.10.18	1,010	D=150~300㎜ L=1,280m	L=1,205m (94.1%)	다사랑건설㈜	시설공단 (김정현)	안효민

□ 기대효과

❍ 효율적인 공정관리를 통한 사업 조기 완료

❍ 공사장 안전관리 강화로 사고 Zero화

❍ 현안사항 및 업체 애로사항 등 만족도 향상

첨부 : 2019년 공정보고회 자료 1부.  끝.