투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「시민의숲 시설물 정비공사」기간 연장 의뢰

1. 시설과-2236(2020.7.13.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『시민의숲 시설물 정비공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 시민의숲 시설물 정비공사

나. 도 급 액 : 금303,060,000원

다. 기    간 : 2020. 04. 22. ~ 2020. 07. 20.

라. 도 급 자 : ****************

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2020.04.22 ~ 7.20

- 변  경 : 2020.04.22 ~ 8.10 (21일 연장)

바. 연기사유

- 우수관(흄관 500m) 교체 작업 추가 공정 및 장마철 우천으로 인한 공기 절대 부족

사. 공사비 변경 : 해당없음

아. 지체상금 : 미부과

붙  임 : 기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	07/14 박종수
협조자
시행	시설과-2253	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)