투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연장 의뢰(시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사)

우리본부에서 추진하고 있는 「시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사」와 관련하여 소요되는 관급자재(태양광발전장치)에 대해 아래와 같이 납품기한을 연장의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 변경내용

**** ********	*** *****	***	*******	****		***
				***	***
*********** ******************	******* ***********	**** *****	**********	`********** *********	`********** ****4.15.	**단* **

2. 변경사유: 해당설비 설치위가 건축물 옥상으로 선행공정인 건축공사 일정에 따라 기한내 설치 불가

3. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 관급자재 납품기한 연장 검토 보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김문호		환경설비과장	김오열		설비부장	07/14 이달영
협조자
시행	설비부-10193	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)