코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 노후전선 정비사업 변경 승인 요청(영등포구)

1. 서울특별시 영등포구 일자리경제과-38691호(2020.7.14.)와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련, 2020년 노후전선 정비사업 선정 시장의 사업변경 승인을 다음과 같이 요청하오니, 원할한 사업 추진을 위하여 검토 후 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경요청근거

- 노후전선 정비사업 운영세칙 제13조(사업변경)

나. 사업변경개요

- 대상시장: 영등포구 ****

- 사 업 비: 금44,155,000원(변경없음)

- 사업변경요청내역

구분	당초	변경
사업기간	'20. 1. ∼ 6.	'20.7. ∼ 12.
사업내용	분전반(4개소) 교체, LED전등 교체	시장 전체 분전반 교체(12개소) 노후전선 규격전선으로 변경

다. 변경요청사유

- 각 층별 분전반은 ****************로 ***************************하며, '20년 국가안전대진단 추진 중 전기 분야에서 *****************됨에 따라, LED전등교체보다 기존에 신청한 4개소 분전반과 신청에서 제외된 8개소 분전반 교체가 시급하여 사업계획 변경을 하고자함

라. 검토의견

- 각 층별 ************ 전기설비로 ********되며, 전기 누전시 화재 발생으로 인한 인명과 재산에 막대한 피해가 우려되어 규격전선으로 교체 및 분전함 12면 전면 교체 등 사업변경이 필요하다고 판단됨

붙임  1. 자치구 사업변경요청 공문 1부.

2. (당초)사업계획서 1부. (메일 송부)

3. 사업변경신청서 및 (변경)사업계획서 각1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울지방중소벤처기업청장(소상공인과장),소상공인시장진흥공단이사장
주무관	안승현		시장현대화팀장	이준학		소상공인정책담당관	07/14 강석
협조자
시행	소상공인정책담당관-11920	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 시티스퀘어 16층	/
전화	02-2133-5192	/전송	02-2133-0714	/	seunga0322@seoul.go.kr	/	부분공개(5)