문서번호	시설관리과-16839
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
윤혜정	박종일	송병욱	07/10 이재호
협 조

「2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(2차, 준공) 심의위원회 개최 결과 보고

2020. 7.

동부수도사업소

2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역

설계변경(2차, 준공) 심의위원회 개최 결과 보고

「2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역」과 관련 물량 증·감에 따른 설계변경에 대하여 심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

1		용 역 현 황

□ 용 역 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속)

□ 용역개요: ******************************

□ 계약금액: ************

□ 용역기간: 2019. 6. 26. ~ 2020. 7. 10.

□ 도 급 자: **************

2		설계변경 사유 및 목록

□ 용역 시행에 따른 물량 증·감

❍ 2019년 하반기 잔여 노후 상수도관 정비 공사 시행에 따른 공사장별 건설폐기물 발생 물량 증가

❍	폐기물 운반: *********************************

❍ 폐기물 처리: *********************************

구분	운반(㎥)	당초	변경	증·감	비고
건설폐기물 운반 (㎥)	폐아스콘	*****	*****	************
	폐콘크리트	***	***	************
	폐토석	***	*****	************
	계	*****	*****	************
건설폐기물 처리 (t)	폐아스콘	*****	*****	************
	폐콘크리트	*****	*****	************
	폐토석	*****	*****	************
	계	*****	******	************
용역비(천원)		*******	*******	***********

3		심의위원회 개최

□ 심의일시: 2020. 7. 10.(금) 14:00

□ 심의장소: 3층 회의실

□ 심의위원: 위원장 시설관리과장

위  원 박종일, 김대용, 강무진, 노운학, 박윤선

4		심 의 결 과

□ 폐기물 처리 물량 증·감에 대한 설계변경 사항

❍ 물량 변동의 적정성 여부: 적정

❍ 관련 규정 및 적법성 여부: 적정

❍ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부: 적정

5		처 리 의 견

□ 설계변경 심의 결과 폐기물 처리 물량 증·감에 따른 물량 및 단가 산정 등이 적합하므로 설계변경(2차) 후 기성(2차, 최종) 시행하여 준공 조치코자 함

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 검토 보고서 1부.

4. 공사장별 폐기물 수량 1부.  끝.