문서번호	도시계획과-9285
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	종합계획팀장	도시계획과장
김래연	심재욱	07/10 조남준

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.6월)

2020. 7.

도시계획정보시스템 및 도시계획포털 유지관리용역 월 간 보 고 (2020.6월)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 UPIS 및 도시계획포털 유지관리 용역

○ 용역기간 : 2020. 01 .01 ~ 2020. 12. 31

○ 용 역 비 : 174,000 천원

○ 용 역 사 : 주식회사 텔루스

○ 과업대상

구 분	시스템명	세부내용
응용 프로그램	도시계획 정보시스템	○ 도시계획입안·결정시스템 ○ 도시계획 인트라넷 ○ 3D 의사결정지원시스템 ○ 과밀부담금관리시스템
	도시계획포털	○ 도시계획포털(웹사이트)
소프트웨어	상용S/W	○ 웹서버 1식 (JEUS & WebToB) ○ 지도엔진 1식 (ArcGIS Server)

○ 과업내용

- 입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

- UPIS DB현행화(도시관리계획 입안·결정도면 편집 및 탑재) 및 유지보수

- 도시계획정보 베이스맵 DB갱신(연속지적도, 건물, 수치지형도 등)

- 시스템 운영 및 유지관리

- 상용 소스트웨어 유지관리(웹서버, GIS엔진)

- UPIS 입력대상 고시자료 모니터링 업무지원

- 헬프데스크 운영 및 지원

□ 주요추진내용

입안결정시스템 용도지역/용도지구 데이터 정확도 제고

○ 추진개요 : KRAS기준 주제도 누락 및 중복, 선형 불일치 등 오류사항 보완

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 2020. 7.

○ 추진대상 : 용도지역, 용도지구, 개발제한구역(추가)

○ 추진절차

자료수급		CODE값 분류		CODE별 중첩확인		누락/중복/ 상이지역 대상추출		추출대상 선형 검토		고도화시스템 DB반영(변환)
‘20.01		‘20.1.~2.		‘20.2.		‘20.2.		‘20.2.~6.		‘20.7.

※ 도형이력관리기능 추가로 처리기간 1개월 연기

○ 추진내용

구분	대상지 추출(건)			검토대상(건)			현행화
세부사항	누락	중복	상이	누락	중복	상이	누락	중복	상이
1. 용도지역	7,609	3,361	139	580	1,032	139	580	-	-
2. 용도지구	-	154	-	-	중복가능	-	-	-	-
3. 개발제한구역	-	-	4	-	-	4	-	-	4

○ 추진내용

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
1. 용도지역	UPIS & KRAS 자료 수집	CODE분류 & 누락 및 중복 대상지 추출		누락 대상 검토	누락사항 현행화	중복 및 상이 대상 검토 & 현행화
2. 용도지구		-	CODE분류 & 중복 대상지 추출	상이 대상 검토 & 중복사항 예외(가능)		상이 대상 현행화
3. 개발제한구역	※개발제한구역 정합성 추가 요청사항			공간정보포털 자료 수집	상이 대상 검토 & 현행화	-
4. 고도화 DB반영							현행화 반영

데이터 현행화

구 분

접수 및 처리내용

처리결과

향후계획

자료

○ 연속지적도 갱신 (월별)

정상처리

○ 연속지적도 갱신 (월별)

○ 건물/기타지역지구/KRAS용도지역

타법 갱신 (분기)

고시

도면

○ 요청대상

고시목록 관리기준일	요청건수	관리대상 (고시 / 조서)	비관리
‘19.10.01~’20.09.30	315건	307건 / 833건	8건
‘19.10.01 이전	2건	2건 / 5건	-

○ 처리현황

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	미처리
‘19.10.01~’20.09.30	307건	179건	35건	93건

○ 2020.6월 현행화 실적

고시목록 관리기준일	관리대상	완료	진행 중	비관리
‘20.06.01~’20.06.30	22건	10건	11건	1건

※ 19년도 6월 실적(26건) 대비 85%

구 분	접수 및 처리내용	처리결과
운영지원	[ 도시계획포털 ] ○ 고도화 관련 알리미 서비스 전화번호 복호화 목록 작성 (고도화 요청자료) ○ 메인페이지 찾아오시는 길, 주소, 도시계획업무 주요 연락처 내용 보완 ○ 포시계획포털사이트 개편으로 인한 내용 공지(적용 7월 연기) - 도시계획정보시스템 C/S(구)버전 운영 종료 안내문구 팝업창 공지 준비 작업 ○ 사이버 침해 이관사항 조치 - 조치 항목별 검토 및 조치결과 작성 전달 ○ 사이버 침해 포털홈피이지 이벤트 로그 감지로 인한 처리 [ 도시계획입안결정시스템 ] ○ UPIS CS버젼 주요기능(분석)화면 이미지 백업 - 시스템 분석기능별 조회 및 결과 화면 문서로 작성 - 기능화면 사용 순서별 문서작업 ○ 고시자료 입안자료 등록 오류 복구 처리	7건
사용자지원	○ UPIS 프로그램 설치 지원, 오류처리, 사용법 문의 등	26건
기타지원	○ 3D의사결정 시스템 위원회/실 운영 별 파일목록 추출 - 위원회 별 표출 파일 리스트 - 실 운영 파일 비교 리스트 ○ 3D의사결정 시스템위원회 이관 대상별 자료 분류/추출 - Virtual Seoul 이관파일(`19~`20) - 전체자료(도시계획/도시건축공동/재정비) ○ 공간정보와 3D의사결정시스템 파일 이관에 대한 파일 정합성 체크 및 자료 제출 ○ 국토부 제출용 고시 목록 및 파일명 작성	2건
시스템점검	○ H/W 및 응용S/W 점검 (내부 점검 시행) ○ S/W 점검 - 웹서버 1식 (JEUS & WebToB) - 지도엔진 1식 (ArcGIS Server)	3건

업무지원

시스템 정기점검

○ 서버 점검

서버명	성능	네트워크 상태	디스크 상태	소프트 웨어	에러
Web Application Server	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 1	양호	양호	양호	정상	없음
Web Server 2	양호	양호	양호	정상	없음

○ 응용SW 점검

서버명	대상기능	점검결과		비 고
		정상	비정상
도시계획정보시스템	18개	18개	-
3D의사결정지원시스템	9개	9개	-
도시계획인트라넷	8개	8개	-
도시계획포털	15개	15개	-

○ 상용SW 점검

서버명	제품명	점검내용	점검내용
지도엔진	ArcGiS 9.3.1	예방점검 (서비스상태, 로그 특이사항, DB연계상태)	양호
WAS	JEUS 6.0.0.7 standard	예방점검 (서비스상태, 로그 특이사항, DB연계상태)	양호
	WebToB 4.1.1.0 BASE_Standard	예방점검 (서비스상태, 로그 특이사항, DB연계상태)	양호

시스템 장애처리

○ 장애처리 요청 내역

합계	응용프로그램	웹서버	DB	서버	기타
-	-	-	-	-	-

○ 장애처리 요청 내역 상세

구분	일 시	장애원인&내용	조치사항	조치결과
-	-	-	-	-

기타사항

○ 유지보수인력 근무상황

성 명	근무내용	근무대상	근무일	비근무일	비고
조 혜 정	시스템 운영 지원	22일	22일	-
김 선 화	데이터 현행화	22일	21.5일	0.5일	휴가

□ 차월 추진계획

구 분	6월 추진계획
데이터 정확도 제고	○ UPIS<>KRAS간 용도지역/용도지구 정합성 검토 및 보완 - “용도지역” 중복지역 대상 검토 > 보완 > 현행화 - “용도지역/지구” 선형 상이지역 검토 > 보완 > 현행화 ○ 도시계획정보시스템 C/S(구)버전 7/20(월) 운영 종료에 대한 공지 및 추가 작업 - 시스템 종료 15일 이전 게시판 공지사항 개제 - 사용자 접근권한 제외 작업(USER 정보 권한 > 삭제로 변경) ○ 도시계획포털사이트 개편으로 인한 내용 공지 - 도시계획정보시스템 C/S버전 운영 종료 및 통합DB서버(구) 운영 중단에 대한 사유 개제 - 안내문구 팝업창 공지 ○ 도시계획정보시스템 데이터백업서버 자료 이관 최종 진행 - 속성자료, 도형자료 - MXD 파일 신규 서버 자료이관 DB연결 ○ 지정문화재 자료 확인 - 좌표계 TEST 진행 ○ LURIS 고시통합관련 국토교통부 대민서비스 고시자료<>서울시 UPIS 고시자료<>토지이용규제서비스(LURIS) 고시자료 비교 - 자료 일치할 수 있도록 검토 후 작업 진행 ○ 고시자료 파일업로드 시 에러 발생 조치 - 서버용량 가득차서 파일업로드 에러 발생 - 데이터센터에서 서러 용량 증설 ○ 알림서비스(이메일) 생성기 – 사무실 주소변경 ○ 도시재정비위원회 명단 반영
시스템 점검	○ 서버 및 어플리케이션 점검

붙임  1. 도시계획 고시/조서 현행화 내역서 1부.

2. 시스템 운영내역 1부.

3. 헬프데스크 처리내역서 1부.

4. 정기점검보고서(서버 및 응용SW) 1부.

5. 정기점검보고서(상용SW) 1부.

6. 유지보수직원 출근부 1부.  끝.