문서번호	정수시설과-7246
결재일자	2020.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		유준수	07/10 조성태
협 조
	주무관			변민용
	주무관			김응균

「암사 제2정수장 수중대차 제작구매설치」 설계변경(계약금액 조정) 검토보고

2020. 7.

암사아리수정수센터

「암사 제2정수장 수중대차 제작구매설치」

설계변경(계약금액 조정) 검토보고

금회 ⌜암사 제2정수장 수중대차 제작구매설치⌟와 관련하여 고재처리비감액 및 제경비정산에 따른 계약금액이 변경되어 이를 검토하고 보고드림

□ 사업개요

❍ 건    명 : 암사 제2정수장 수중대차 제작구매설치

❍ 계약금액 : 금107,492,440원

❍ 계약기간 : ’20.2.28. ~ ’20.7.26.

❍ 사업내용 : 침전지 슬러지수집기(수중대차형) 3대 교체

❍ 계약업체 : 사단법인 한국장애인연맹 대표 황 광 식

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	*************
	변 경	*************
	증·감액	************
공사기간	당 초	*********************
	변 경	****

※ 금회 계약금액 변경에 따른 세부내역 : 붙임참조

❍ 변경사유

- 발생제 물량 증가에 따른 고재처리비 감액 및 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 미사용에 따른 감액

□ 향후계획

❍ 변경계약 시행 및 준공 : ’20.7.

붙임 : 설계변경내역서, 합의서, 증빙서류 각 1부.  끝.