(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

남산 회현자락 한양도성 유적박물관 조성공사(전기)

공사개요

· 위치: 서울 중구 회현동1가 100-177

· 공사기간 : ‘19.3.26. ~ ’21.5.30.

· 도 급 비 : ************

· 시공사 : ㈜녹천전기

· 감리단 : 주식회사 더한양

· 설계사 : ㈜건창기술단

실정보고 건명

외등분전반 LP-B 위치변경

실정보고 사유

건축공정변경으로 LP-B 분전반 지반이 높아짐에 따라 외등분전반의 설계지점 설치 및 유지보수가 불가하므로 LP-A 지점으로 옮겨 설치하고자 함

감리단

검토의견

현장불일치 해결 및 기술적이나 유지보수 관리 차원에서 문제점이 없어 실정보고 내역의 타당성이 인정됨

공기에 미치는 영향

해당사항 없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고
위치	분전반 LP-B를 분전반 LP-A에서 20여m 떨어진 곳에 설치	분전반 LP-B를 분전반 LP-A 위치에 설치하고 결선	기 설치된 배관 이용
금액	변경없음

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 ( O )

당초 사업비 범위내 시행가능 (    )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발주처

검토의견

실정보고에 대한 감리단 검토의견이 타당하므로, 실정보고 승인 후 공사를 진행하고 추후 설계변경을 통해 이를 반영하도록 함.

비 고

결재

★주무관

백영기

도성관리팀장

이원재

한양도성도감과장

07/15

代김종필

협조