문서번호	시설과-4026
결재일자	2020.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
임춘길	김형준	강호광		07/15 구아미
협 조
	교육훈련팀장		조수진
	안전총괄과장		조임남
	주무관		이준상

20년 배수지 내부방식공사

품질확보 및 안전관리 추진계획

2020. 7.

상수도사업본부

(시설관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘20년 배수지 내부방식공사

품질확보 및 안전관리 추진계획

‘20년 시행예정인 배수지 내부방식공사의 품질확보 및 안전관리를 위한 추진계획(감리원 배치 및 교육시행 등)을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 대    상 : 배수지 3개소(신림6, 길동, 용마), 6,929백만 원

○ 사업기간 : 2020년 1월 ～ 12월

○ 사업내용 : 구조물 표면에 코팅재를 부착하여 염소 등에 의한 콘크리트 면의 중성화 방지

구 분	계	수도사업소
		남 부	동 부	강 동
배수지(대상지수)	3개소(5개 지)	신림6(2개 지)	용마(1개 지)	길동(2개 지)
시설용량(지수)	160,000(10개 지)	20,000(2지)	80,000(4지)	60,000(4지)
총사업비	6,929	2,679	1,670	2,580
공법(자재) 공급업체	천장(도막)	티오켐(주)	청암산업개발(주)	비앤비(주)
	벽체(도막,패널)	금빛산업(주)
	바닥(패널)		천록산업(주)	모던비앤씨(주)
구조물 공사업체	2개사	-	성준건설(주)	늘찬건설(주)

□ 그간 추진현황

○「내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준」개정   : ‘20. 2.13

○ 내부방식 계열선정(2.27) 및 공법선정위원회(4.14~6.12) 개최

※ (길동배수지) 1순위업체 공법선정지위 포기로 사업자 재선정.(매일엔지니어링 → 모던비앤씨)

○ 내부방식추진관련 발주부서 담당 과장회의 개최          : ‘20. 5. 7

- 공사 수행시 단계별 조치(유의)사항, 광암정수지 하자사례 공유, 안전관리대책 등

○ 사업발주 및 계약체결                                  : ‘20. 7월중

- (계약체결) 용마, 길동배수지,  (계약심사 중) 신림6배수지

□ 세부 추진계획

① 건설사업관리기술인(감리) 배치 운영

○ 용 역 명 : 상수도공사 건설사업관리용역

○ 용역기간 : ‘19.6.22 ~ ’21.6.21

○ 도 급 자 : 남부수도(건양엔지니어링), 동부·강동수도(이준엔지니어링)

○ 배치계획 : 경험이 많은 중급 이상으로 고정배치(1명)하여 운영

※ 현장여건에 맞추어 탄력적으로 배치 운영

구 분	사업소(배수지명)
	*******	******	******
감 리 자	***	***	***
기술등급	**	**	**
상수도감리 근무	***********	***********	***********
주요 이력	********************* **********************	************ ******************** ***********************	************ ************** ***************

② 품질확보 및 안전관리 교육 실시

	〈추진방향〉
❖ 공무원, 감리, 공법(시공)사 등 관계자 대상 교육을 통한 품질확보 인식강화 ❖ 외부전문가 경험을 바탕으로 한 내실있는 맞춤형 교육으로 공사품질 향상 및 사업참여자 역량 배양 ❖ 사고예방을 위한 안전관리 교육 실시

○ 교육개요

- 일    시 : ‘20. 7. 23.(목) 14:00∼16:30

- 장    소 : 본부 4층 회의실

- 교육대상 - 총 21명

· 본   부(6) : 시설과 2, 생산관리과 2, 안전총괄과 2

· 사업소(6) : 남부수도 2, 동부수도 2, 강동수도 2

· 감  리(3) : 건설사업관리용역 감리 3

· 시공(공법)사(6) : 공사현장대리인 3, 공법사 현장책임자 3

- 교육내용 : 내부방식 시공 및 안전관리, 품질확보 방안 등

· 공사 전 바탕면 건조을 위한 적정 함수율 8%이하 유지 및 측정방법

· 방식품질을 좌우하는 줄눈재 및 패널 시공방법(떠붙임 → 압착붙임)

· 밀폐공간 고소작업, 가연성 제품 취급 등 안전사고 예방요령 등

- 교육강사 : ***********************

성 명	소속/직위	주 요 약 력
*	********* **	********************** **************************** **************************** ******************************

□ 행정사항

○ ‘20년 내부방식 발주부서(남부, 동부, 강동)는 참석자명단 제출 : ‘20.7.17한

사업소명	성명	직위	담당업무	연락처

○ 함수율 측정, 줄눈재 등 주요 공정 시 주기적으로 합동점검실시(안전총괄과+시설과) 실시

○ 참석자 교육시간 인정: 2시간 30분  ※ 인력개발과 교육훈련팀장 협조

○ 교육 강사료 지급: 360천원 (일반 1급 360천원×1명)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

※ 인재개발원 강사수당 등의 지급 기준표(‘20.5.1) 준용

붙임 : 1. ‘20년 배수지 내부방식사업 현황 1부.

2. 강사료 및 원고료 지급기준 1부. 끝.