문서번호	시설과-2277
결재일자	2020.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		하종식	07/15 박종수
협조
	재무팀장		곽선아

「시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사」

설계변경 검토 보고

2020. 07.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사」

설계변경 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인｢시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사｣와 관련하여 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

□ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사

❍ 위    치 : 경기도 군포시 고산로589(시립엘림노인전문요양원)

❍ 공사기간 : 2020.05.27. ~ 07.25.

❍ 도 급 비 : *********

❍ 도 급 자 : ***************

❍ 공사내용 : 녹지 및 휴게공간 조성

□ 검토 내용

❍ 설계변경 내용

구 분	현장실정 검토사항	검토의견	비 고
식재 시설	※시설 요청사항 ※녹색자금 점검 및 자문 ◯ 원활한 배수를 위해 배수시설 추가 설치 ◯ 동선 각진 부분은 보행 안전을 위해 곡선으로 포장 ◯ 시설이용자를 위한 벤치 추가 설치 ◯ 시설이용자의 안전 및 이탈을 방지 하기 위한 출입문 추가 설치 ◯ 식재 경관 및 녹음을 고려하여 수목 및 위치 조정, 사면 경계 식재 요청 ◯ 앉음벽을 담장(추억회상 등)으로 변경 요청 ※현장실정 사항 ◯ 식재 경관을 고려 기존 수목 이식 ◯ U형측구 규격이 기존 우배수 규격과 현장 여건이 상이하여 원활한 배수를 위해 변경 필요	◯ 식재경관, 안전을 고려 하여 수목 계획 조정 -능수백도화(H3.5xR10) : 2주→0주 -이팝나무(H4.0xR15) : 0주→4주 -왕벚나무(H4.5xB20) : 0주→1주 -감나무(R20,이식) : 0주→1주 -목련(R25,이식) : 0주→1주 -목련(R20,이식) : 0주→1주 -잣나무(R15,이식) : 0주→1주 -청단풍(R20,이식) : 0주→3주 -화살나무(H1.0xW0.4) : 0주→270주 -잔디 : 0㎡→500㎡

구 분	현장실정 검토사항	검토의견	비 고
		◯ 현장여건 등 고려하여 우배수 및 시설계획 조정 -U형측구 : 23m→0m -U형측구-1 : 0m→2m -빗물받이 : 0개→5개 -연결관 : 0m→69.8m -출입문 : 1개→2개 -등의자 : 5개→7개 ◯ 앉음벽은 기존 높이(H400)에 시설측에서 추가 공사 할수 있도록 조정 -앉음벽 : 1식→0식 -앉음벽-1 : 0식→1식
기타	◯ 보험료 등 제경비 정산

□예산내역

(단위:원)

구 분		공 사 비			비 고
		당초	변경	증감
총공사비		136,074,439	152,223,380	16,148,941	증
도급액	공급가액	97,787,109	111,663,637	13,876,528	증
	부가가치세	9,778,710	11,166,363	1,387,653	증
	계	107,565,819	122,830,000	15,264,181	증
관급자재비		28,508,620	29,393,380	884,760	증

□ 예산집행 내역

(단위:원)

구분	공사비 집행액					비고
	총사업비 (a)	발주액 (b)	계약액 (c)	관급자재 (d)	잔액 (e=a-c-d)
	152,318,000	123,809,380	107,565,819	28,508,620	16,243,561

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 시설과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길조성), 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서:푸른조시국조경과)

□ 검토의견

❍ 상기 검토보고 내용과 같이 공사 시행

❍ 추가 공사비용은 공사 잔액을 사용 하여 관급자재 추가 및 설계변경 시행

❍ 계약부서에 설계변경 시행 계약 요청(→공원운영과)

붙임   1. 변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 시설요청공문, 자문사항 등 1식.  끝.