문서번호	도시관리과-7762
결재일자	2020.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	도시관리정책팀장	도시관리과장	도시계획국장
장지광	김동구	홍선기	07/15 이정화

‘서울특별시 지구단위계획 결정 DB 구축  용역(1차)’

준 공 기 한  변 경 계 획

2020. 7.

도시계획국

(도시관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘서울특별시 지구단위계획 결정 DB 구축  용역(1차)’

준 공 기 한  변 경 계 획

‘도시계획정보시스템(UPIS) 웹기반 업무포털 2단계 구축용역’의 사업기간이 연장됨에 따라 UPIS에 지구단위계획 결정정보 DB를 안정적으로 탑재하기 위한 테스트 진행 등을 위해 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울특별시 지구단위계획 결정 DB구축 용역(1차)

○ 용역기간 : ’19. 7. 16. ~ ’20. 8. 31.

○ 계약업체 : ㈜우대칼스

○ 계약금액 : 570,000,000원

○ 주요내용 : 13개 자치구 지구단위계획 결정정보 DB 구축 및 UPIS 탑재

- 종로, 중구, 용산, 성동, 성북, 은평, 마포, 양천, 영등포, 동작, 관악, 강남, 서초

※ 나머지 12개 자치구는 2차 사업으로 추진(’20. 7. 3. ~ 12. 20.)

□ 추진경위

○ ’19. 7. 16.      용역계약 체결

○ ’19. 8.~ 9.     지구단위계획 결정자료 수집

○ ’19.10.~ ’20.3.   지구단위계획 결정사항 DB 구축 및 내부검수

○ ’20. 4.~ 05.    자치구 및 유관부서 자료 검수

○ ’20. 6. 18.      UPIS 웹기반 업무포털 2단계 구축용역 준공기한 연장

(’20. 6. 26. → ’20. 9. 26.)

○ ’20. 6. 25.      미집행  도시계획시설 실효에 따른 변경사항 일괄고시

(과업 대상지 내 42건 결정사항 변경 발생)

□ 설계변경 내용

○ 변경내용 : 준공기한 연장(계약금액 변경 없음)

구 분	계 약 기 간	증 감
당 초	’19. 7. 16. ~ ’20. 7. 14.	48일 연장
변 경	’19. 7. 16. ~ ’20. 8. 31.

○ 변경사유

- “도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축용역□사업기간 연장에 따라(2020년06월26일→2020년09월26일, 3개월 연장) 지구단위계획 결정정보 DB 탑재를 위한 테스트 진행기간 확보

- 최근 장기미집행 도시계획시설 해제에 따른 지구단위계획 일괄변경(2020.  6.25. 고시 / 과업 대상지 내 42개소)으로 DB 구축기간 추가 소요

○ 지체상금 :부과하지 않음(발주처 귀책사유)

□ 향후계획

○ ’20. 7.  계약변경 요청(도시관리과 → 재무과)

붙임 : 과업기간 연장 요청 공문(합의각서 포함) 1부.  끝.