문서번호	설비부-10368
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	07/16 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

관급자재(공기순환기) 구매취소 검토보고

2020. 07.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

관급자재(공기순환기) 구매취소 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」공기순환기 관련 최대 납품기한 연기 가눙일(2020.9.26.)까지 납품설치가 어려워 구매 취소후 재구매하고자 검토보고 드림

‣구매취소내용 : 공기순환기 24대 및 옵션 / 72,613천원

‣구매취소사유 : 선행공정 지연으로 최대 납품기한 연장일까지 납품설치 어려움

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(1차  ’19.10.25.~’20.08.31.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(1차 30,000,000원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 공기순환기 구매취소 검토보고 : PC20(동대문 실버케어)-290호(2020.07.15.)

Ⅲ		검토내용

□ 계약현황

품명	납품요구번호	금액	납품기한	납품업체
공기순환기 (본품)	****************	***********	**********	****
공기순환기 (옵션)	****************	***********	**********	****

□ 구매취소 내용

- 품명 및 수량 : 공기순환기 24대 및 설치옵션 1식

- 계약금액 : 총72,613,630원

□ 구매취소 사유

- ‘물품다수공급자 특수조건’ 제26조 납품기한을 30일씩 2회 최대 60일로 2020.9.26.까지 연장 가능하나 선행공정 지연 등으로 최대 연장일까지 납품 설치가 불가하여 취소후 재구매 진행하고자 함

□ 건설사업관리기술자 의견

- 현장여건을 면밀히 검토한 결과 최대 납품기한 가능일(2020.9.26.)까지 납품설치가 어려으므로 계약취소 후 재구매함이 타당하다고 판담됨

□ 보고자 의견

- 건설사업관리기술자의 의견이 타당하다고 판단하므로 공기순환기 구매 취소후 수급시기에 맞춰 재구매하고자 함

Ⅳ		향후계획

□ 2020.07월 : 공기순환기 취소 의뢰

□ 2020.10월 : 공기순환기 재구매

□ 2021.03월 : 공기순환기 납품 및 설치

붙임 :  책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.