문서번호	기전과-7242
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정영술		서수일	07/16 김영철
협조

2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

서부도로사업소

(기전과)

2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고(1차)

우리 사업소 관내 「2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

시행 중 연간단가 계약 물량 변동 및 신규내역 추가에 대한 시공 감리의 설계변경 요청이 있어 설계 변경코자 함.

□ 관련 근거

○ 1차 설계변경(감리원): 서우제 2020-155호(2020. 7. 15.)

○ 태성트라텍 설계변경 요청건: TS(업)-2007-02호(2020. 7. 13.)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치 : 서부도로사업소 관내(시도)

○ 공사내용 : 교통안전표지 신설·교체·철거·이설 등 1식

○ 계약금액 : 금81,698,000원

○ 공사기간 : 2020. 2. 17.∼2020. 12. 31.

○ 계약업체 : ㈜태성트라텍 대표 임태규

○ 감리업체 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

○ 예산 과목: 서부도로사업소 기전과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전

시설물 관리(교통관리계정), 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	81,698,000	81,698,000	변동 없음

○ 변경 내역

연번	품명	수량		증·감
		당초	변경
1	교통안전표지 신설	108	221	증)113
2	교통안전표지 교체	96	183	증)87
3	교통안전표지 철거	72	56	감)16
4	교통안전표지 이설	12	7	감)5
5	교통안전표지 문안수정	12	10.4	감)1.6
6	교통안전표지 방향수정	2	2	-
7	교통안전표지 포장복구	2	1	감)1
8	교통안전표지 도장	7	4	감)3
9	지주철거(버스전용표지)-신규비목	0	1	증)1
합 계		311	485.4	증)174.4

□ 변경 사유: 1차~4차 작업지시 물량 반영하여 기성금 지급을 위한

내역 변경 및 신규내역 추가 반영

□ 검토 의견

○ 작업지시 물량 변동으로 인한 계약 물량 변경 및 신규내역 추가사항을

반영하여 설계변경코자 함

□ 행정사항

○ 설계변경 내역에 대하여 변경 계약 요청→ 관리단속과

붙임 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.