코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰

1. 공공개발기획단-7282호(2020. 7. 16.)와 관련입니다.

2. 우리 단에서 추진중인 인재개발원일대 구조안전진단 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 인재개발원일대 구조안전진단 용역

나. 계 약 자 : **************

다. 용역기간

- 기존 : 2020. 3. 25. ~ 7. 26. (4개월)

- 변경 : 2020. 3. 25. ~ 8. 26. (5개월)

라. 계약금액

- 기존 : 금51,847,400원

- 변경 : 금45,766,600원(감6,080,800원)

마. 변경사유 : 코로나 대응 및 과업내용 변경에 따라 기간 및 금액 변경

바. 예산과목 : 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발, 토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여 프로그램 운영, 시설비

첨부   1. 용역 설계변경 방침 1부.

2. 용역사 준공기한 연기 및 용역 설계변경 요청 공문 각 1부.

3. 변경설계내역서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 과업내용서(변경) 1부.

6. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	최희영		공공토지팀장	염규엽		공공개발추진반장	07/16 이상면
협조자	계약1팀장	원종순
시행	공공개발기획단-7295	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)