투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사 설계변경 시행 및 변경 계약 의뢰

1. 시설과-2277(2020.7.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 시립엘림노인전문요양원 녹색자금 나눔숲 조성공사

나. 총공사비 : ********************************

**************************************

다. 공사기간 : 2020. 5. 27. ~ 2020. 7. 25.

라. 도 급 자 : ***************

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	***********	***********	*	**********
공 급 가 액	**********	***********	*	**********
부 가 가 치 세	*********	**********	*	*********
도 급 공 사 비	***********	***********	*	**********
관급자재비	**********	**********	*	*******

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 시설과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 녹색자금지원사업(나눔숲·나눔길조성), 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서:푸른도시국조경과)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	代김재희		시설과장	07/16 박종수
협조자
시행	시설과-2285	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)