문서번호	정수시설과-7453
결재일자	2020.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	07/16 조성태
협 조
	주무관			변민용
	주무관			김응균

「암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치」 설계변경(계약금액 조정) 검토보고

2020. 7.

암사아리수정수센터

「암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치」

설계변경(계약금액 조정) 검토보고

금회 ⌜암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치⌟와 관련하여 제경비정산 등에 따른 계약금액이 변경되어 이를 검토하고 보고드림

□ 사업개요

❍ 건    명 : 암사 제2취수장 이동밴드스크린 제작구매설치

❍ 계약금액 : *************

❍ 계약기간 : ’20.2.21. ~ ’20.7.19.

❍ 사업내용 : 이동밴드스크린(W2.4×L18.6m) 2대 교체

❍ 계약업체 : ****************

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	*************
	변 경	*************
	증·감액	************
공사기간	당 초	*********************
	변 경	****

※ 금회 계약금액 변경에 따른 세부내역 : 붙임참조

❍ 변경사유

- 미사용 제경비(산업안전보건관리비) 정산 및 설계변경에 따른 계약금액조정검증시스템 과다산출금액(일반관리비, 이윤) 감액

□ 향후계획

❍ 변경계약 시행 및 준공 : ’20.7.

붙임 : 변경내역서, 합의서, 보험료완납증명서, 계약금액검증확인서 각 1부.  끝.