문서번호	공공재생과-7558
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생정책팀장	공공재생과장
김지호		代김지호	07/17 이동일
협조

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 - [중림2길]마중마당길 조성사업 시행계획 변경 및 공사시행

2020. 7

공공재생과

- 서울로2단계 연결길 조성 사업 관련 - [중림2길]마중마당길 조성사업 시행계획 변경 및 공사시행

서울로2단계 연결길 조성 시범사업을 추진 중인 중림2길 마중마당길 조성사업에 대하여 주민의견수렴, 전문가자문 등을 거쳐 사업범위 조정 등 시행계획을 변경하고 공사시행 하고자 함

Ⅰ				추진개요		‘

□ 추진근거

○ 서울로2단계 연결길 조성 기본계획 수립(‘19.10.29)

○ 서울로2단계 연결길 조성 사업 실행계획 수립(‘19.10.31)

○ 마중마당 조성 설계 용역시행 계획(‘19.11.15)

○ 서울로2단계 연결길 조성 추진 사항 보고(‘20.6.18)

□ 사업개요

○ 위 치 : 중구 만리재로37길 교차부(서울로2단계 연결길 중 중림2길 구간)

○ 규 모 : 광장 일부와 차로일부 포장 및 설치물 계획(면적 400㎡)

○ 기본계획안

- 서울로~만리광장~손기정 공원을 잇는 주요 지점으로 상징성있는 공간으로 조성 - 만리광장 확대, 차로를 보행광장으로 디자인하고 입구성을 강조하는 각종 디자인 시설물 설치

□ 추진경위

○ ‘19.12.05 : 설계용역 계약(에이앤엘스튜디오 건축사사무소)

○ ‘20.04.02 : 설계검토회의 결과

- 사업범위 확대 필요, 보도와 차도의 단차이를 없애는 것은 교통관련 자문 필요, 도로포장에 대한 실시설계는 구에서 별도 수행

○ ‘20.04.08 : 전문가 자문회의 개최 결과

- 차도부분 전체를 보도와 단차이를 최소화 하여 보해위주의 도로조성 바람직

- 손기정 진입로에 대한 인지성 확대를 위한 디자인 필요

- 차로부분은 차량속도 저감을 위해 직선화 보다는 곡선화 할 것 등

○ ‘20.1~5  : 골목스튜디오 운영을 통한 주민의견수렴

○ ‘20.06.09 : 서부도로사업소 협의

- 도로포장은 판석 또는 벽돌 보다는 유지관리를 위해 아스콘 포장이 적정함

○ ‘20.07.08 : 공사발주 관련 실무협의

- 조속한 사업시행을 위해 중구에서 실시설계 및 공사발주(9월 중 완료)

Ⅱ				시행계획 변경		‘

□ 주요변경 내용

*******	******	*****	**
******	**************	**************
******	********	************************** ******************
****	**************** *************************	**************************************
*****	*********	********* ***************
****	*	*

□ 세부내용

*******************

***********************************************************************************************

*********************

**********************************************************************************

*******************

*********************************************************************

************************************

************************************************

Ⅲ				추진일정		‘

○ ‘20.07.       : 예산재배정, 실시설계 및 공사발주 의뢰(시→중구)

○ ‘20.08~09.   : 실시설계 및 도로포장 공사 완료

○ ‘20.10~12.   : 사업완료

Ⅳ				행정사항		‘

□ 부서별 추진 사항

○  시(공공재생과)  : 사업총괄, 예산 재배정, 안내표지 및 가로시설물 설치

○ 중구(도로시설과) : 도로포장에 대한 실시설계 및 공사

○ 중구(도심재생과, 가로환경과) : 상가활성화를 위한 야외영업장 인허가 검토

□ 예산재배정

○ 재배정액 : 450,000천원

○ 예산과목 : 도시재생특별회계, 도시재생실 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울로2단계 연결길 조성, 시설비(205-401-01)

※ 예산범위내 공사시행 후 잔액은 공공재생과로 반납

붙임 : 설계관련 서류 1부(별도송부).  끝.